문서번호	건축부-16838
결재일자	2021. 10. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김예림		정채문	10/21 신명승
협조
	주무관		고병연

『G밸리 근로자문화복지센터 건립공사』

건설폐기물처리용역(2차) 계약기간 연장 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

【 건 축 부 】

G밸리 근로자문화복지센터 건립공사 』

건설폐기물처리용역(2차)계약기간 연장 검토보고

「G밸리 근로자문화복지센터 건립공사 건설폐기물처리용역(2차)」과 관련하여 용역사로부터 용역기간 연장 요청이 있어 검토보고 드림

1		용역현황

○ 용 역 명: G밸리 근로자문화복지센터 건립공사 건설폐기물처리용역(2차)

○ 용역내용: 건설폐기물 수집·운반 및 처리(6,640톤)

○ 용역기간: ’18. 3. 1.~’21. 10. 27.

○ 용 역 비: 191,280,000원(2차 46,980,000원)

○ 용 역 사: ㈜동성 외1개사

2		추진경위

○ ’18. 02. 07.: 건설폐기물용역(’20.3.1~’21.9.30)

○ ’18. 03. 01.: 용역 착수

○ ’20. 06. 30.: 건설폐기물용역(1차) 준공

○ ’20. 07. 03.: 건설폐기물용역(2차) 시행 및 계약변경(’20.7.3~’21.2.15)

○ ’21. 02. 04.: 건설폐기물용역(2차1회) 계약변경(’20.7.3~’21.2.15)

○ ’21. 09. 24.: 용역기간 연장요청************************

○ ’21. 09. 30.: 변경계약 체결(용역기간: 2021. 9. 30. → 2021. 10. 27.)

○ ’21. 10. 19.: 용역기간 연장요청***************************

3		계약변경 검토

□ 관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건 제7절 2. (계약기간의 연장)

○ 「G밸리 근로자문화복지센터 건립공사」건설폐기물 처리용역 총차 및 2차수 공사기간 연장요청 ***************************

□ 용역기간 연장 사유

○ 공사 준공 후 현장정리 및 잔여 폐기물의 원활한 처리를 위해 폐기물 처리 기간의 1개월 연장이 필요함

□ 용역기간 변경내용

구 분		변경전	변경후	비 고
용역기간	**	*********** *************************	*********** *************************	******* *************
	**	********** *************************	********** *************************	******* *************

□ ****** 없음

□ **************

4		건설사업관리기술인 검토의견

*********************************************

5		처리의견

******************************************** ***************************

붙 임: 건설폐기물 처리용역 총차 및 2차수 공사기간 연장요청 1부.  끝.