문서번호	기전과-8947
결재일자	2021. 10. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이건용		석대창	10/22 차창훈
협조
	주무관		이정호

<양재지하차도 진입차단시설 설치>

공사 발주 계획 보고

2021. 10.

남부도로사업소

(기전과)

<양재지하차도 진입차단시설 설치>

공사 발주 계획 보고

양재지하차도 진입차단시설 실시설계 용역이 준공되어, 성과품을 기반으로 진입차단시설의 설치 공사 발주 계획을 보고 드림

１

추진근거

❏ 실시설계 용역 준공 결과 보고

❍ 기전과-8702(2021. 10. 18.)

- 진입차단시설 용역 성과품 납품 완료(도면, 내역서, 시방서, 구조계산서)

2

시설 현황

❏ 양재지하차도 시설 현황

침수등급	폭	연장	통과제한높이	차로수
3등급	18m	180m	4.1m	왕복4차로

위치도(서울 강남구 도곡동)	지하차도 전경

3

사업 추진 개요

❏ 2021. 8. 17. 양재지하차도 진입차단시설 설치 계획 방침

❏ 2021. 8. 18. 실시설계 용역 예산 재배정

❏ 2021. 8. 25. 실시설계 용역 발주

❏ 2021. 8. 27. 용역 계약

❏ 2021. 8. 31. ~ 10. 14. 용역 착수 및 준공

❏ 2021. 10. 13. 예산재배정 신청

❍ ******************

4

사업별 세부 추진계획

❏ 공사 발주(금속구조물공사)

❍ 공 사 명 : 양재지하차도 진입차단시설 설치공사

❍ 계약방법 : 경쟁입찰(분담이행방식)

- 금속구조물·창호·온실공사업, 기계설비공사업을 모두 등록한 업체

- ******************************************

❍ 소요예산 : ******************

❍ 공사기간 : 착공일로부터 90일

❏ 공사 발주(전기공사)

❍ 공 사 명 : 양재지하차도 진입차단시설 설치 전기공사

❍ 계약방법 : 전자공개 수의계약(지역제한)

❍ 소요예산 : *****************

❍ 공사기간 : 착공일로부터 90일

❏ 공사 발주(토목공사)

❍ 공 사 명 : 양재지하차도 진입차단시설 설치 토목공사

❍ 계약방법 : 수의계약

- *****************************

- 근거 : 지방계약법 시행령 제25조 1항 5호

- 동절기 도로굴착통제에 앞서 굴착공사 완료를 위해 진입차단시설의 토목공사를 별도로 계약 진행

❍ 소요예산 : *****************

❍ 공사기간 : 착공일로부터 30일

5

추진 일정

❍ 2021. 10. 공사 발주

❍ 2021. 12. 공사 준공

붙임 : 설계내역서 3부.  끝.