문서번호	급수운영과-17350
결재일자	2021. 10. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
급수관리팀장	급수운영과장
류태현	10/22 이용구
협 조

『신림6배수지 내부방식 공사』

실정보고에 따른 검토의견 보고

2021. 10.

남부수도사업소

(급수운영과)

『신림6배수지 내부방식 정비공사』

공사실정 보고에 따른 검토의견 보고

우리사업소에서 시행중인 『신림6배수지 내부방식 공사』 현장실정 보고에 따른 검토 의견을 보고 드림

***공사현황

○ 공 사 명 : 신림6배수지 내부방식 공사

○ 공사기간 : 2020. 08. 25 ~ 2021. 11. 02

○ 도 급 액 : 2,295,227,000원

○ 공사개요

- 도막식(세라수침투) 방수방식 : 6,620㎡

- 패널식(켐코타일) 방수방식 : 7,440㎡

○ 도 급 자 : 네패스이앤씨㈜  대표 남택용외 1인

○ 감 독 자 : 서울시설공단  박영환

2. 보고내용 및 검토의견

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
1	주휴수당 반영	• 건설일자리 혁신방안(고용개선지원비 도입, 서울시장방침 제21호(2021.6.15.))에 따라 전자인력 관리시스템을 현장에 도입하고 건설노동자에 대한 주휴수당 지급을 시행 하고자 함.	•『타당함』 • 전자인력관리시스템에 의한 전자카드 단말기를 현장에 설치하고, 근로자에게는 전자카드를 발급하여 관련근거(건설혁신과 -7979호(2021.6.28.), 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준)의거 주휴수당 지급을 승인코자 함. • 개략공사비: 증)47,639천원(추후 실정산).
2	도막 (세라수) 추가시공	• 신림6배수지 출입구 도막공법 추가 시공 및 독산배수지 일부의 기존 노후 도막 철거 및 재시공 작업지시에 따른 물량 증가를 반영코자 함.	•『타당함』 • 도막식 공법의 신림6배수지 출입구 추가 시공(277㎡) 및 독산배수지 일부의 기존 노후 도막 철거 및 재시공(87㎡)을 승인 코자 함. • 개략공사비: 증)25,740천원.

3. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 서울시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임  1. 공사 실정보고 공문 각1부.

2. 공사 실정 보고서 각1부.

3. 관련서류 각1부.  끝.