문서번호	기전과-5402
결재일자	2021. 10. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 10/22 서승완
협조

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

강서도로사업소

[기 전 과]

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사
실정보고사항 검토보고

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 관련 책임감리가 제출한 실정보고에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(화곡로입구 외 8개소) 현장 실정보고

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-10-34호(2021.10.21.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 양천구 목동오거리, 신정사거리, 청소년회관 앞, 화곡로입구,

영등포구 당산동교차로, 양남교차로, 영등포유통상가, 구로구 거리공원오거리

○ 공사내용

- 목동오거리 : 신호현시 조정(신호등 신설 및 철거)

- 신정사거리 : 신호현시 조정(신호등 보강설치 및 원형변경)

- 청소년회관 앞 : 신호등 신설 및 철거

- 화곡로입구 : 신호등 신설

- 당산동교차로 : 신호현시 조정(노후 제어기 교체)

- 양남교차로 : 신호현시 조정(노후 제어기 교체)

- 영등포유통상가 : 신호현시 조정(신호등 신설)

- 거리공원오거리 : 신호등 신설 및 이설, 잔여시간표시기 설치

○ 계약금액 : 272,647,510원

○ 공사기간 : 2021.6.15. ∼ 2021.11.11.

○ 계약업체 : 해솔이엔씨(주) 대표 허지훈

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 실정보고 내용

○ 도급비 세부내역 : 감 19,405천원(272,647천원 → 253,242천원)

- 목동오거리 : 직접비 감 18,911천원

· 현장조사결과 지주 재사용 가능하여 기존 지주 부착대에 차량신호등     추가 설치로 변경

- 양남교차로 : 직접비 감 601천원

· 현장조사결과 제어기 지주형좌대 재사용 가능하여 재사용

- 거리공원오거리 : 직접비 감 3,019천원

· 지장물(교각)로 인한 기초 설치 불가하여 지주 설치 제외(P9)

· 설계 누락 지주 위치 변경(P12) 및 설계 오류 지주(P5) 규격 변경

- 신정사거리 : 직접비 증 148천원

· 현장조사결과 제어기 지주형좌대 재사용 가능하여 재사용

· 현장조사결과 음향신호기 불량 추가 교체 및 보행등 불량 추가 보수

- 청소년회관 앞 : 직접비 증 2,839천원

· 현장 여건에 따라 양날개 지주로 변경 및 부착대 변경

· 노후 케이블 추가 교체 및 현장 여건 반영하여 보도 굴착 규격 변경

- 영등포유통상가 : 직접비 증 6,667천원

· 현장 여건에 따라 지주 위치 변경, 지주 및 부착대 규격 변경

· 관로 선통 불가로 아스팔트 야간 굴착 추가 및 지장물(오수관)로	굴착 및 배관 규격 변경, 현장 여건 반영 보도 굴착 규격 변경

· 노후 케이블 추가 교체 및 연간단가 공사 시행 케이블 물량 제외

· 지주 위치 변경으로 가로등 통합 불필요하여 통합 물량 제외

· 설계 오류 보도 배관 제외

- 화곡로입구 : 직접비 감 10,554천원

· 기설치 음향신호기 제외

· 지장물(오수관)로 기초설치 불가 지주 설치(P8) 제외

· 현장조사결과 지주(P3) 설치 위치가 부적절하여 기존 지주(P4)에      부착대 설치 가능하여 지주 설치(P3) 제외

· 현장조사결과 통합 가능하여 통합주(차/보)로 변경 설치

· 지장물(통신관)로 기초설치 불가 지주 설치(P12) 위치 변경

- 영등포로터리 : 직접비 증 13,575천원

· 추가 업무지시 물량 반영 및 현장 여건 반영 보도 굴착 규격 변경

- 간접비(간접노무비 및 보험료 등 제경비) : 감 9,549천원

○ 관급자재(신호등주) 변경내용

- 7본 감소(21본 : 추가 업무지시 포함 → 14본)

· 350A 15M 4본 감소, 300A 13M 6본 감소, 300A 11M 1본      감소, 250A 11M+9M 1본 증가, 250A 11M 4본 증가, 125A     6M 1본 감소(재사용 1본, 구매 13본)

※ 상세 내용 및 내역 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 책임감리 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에      따라 작업지시하고 추후 정산물량 반영 설계변경 시행

○ 관급자재(신호등주)는 변경 내용으로 조달구매 시행

붙임  2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(화곡로입구 외        8개소) 현장 실정보고 1부.  끝.