문서번호	급수운영과-20549
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김동건		정헌석	10/25 代문병희
협 조
	주무관			임복섭

『홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사-폐관충진』

공사현장 실정보고에 따른 검토 보고

2021. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

『홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사-폐관충진』

공사현장 실정보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사』에 대하여 서울시설공단으로 부터 실정보고가 있어 이를 검토하고자 합니다.

※관련대호 공사감독2처-13425호(2021.10.19.)

1. 공사 현황

가. 공  사  명： 홍익병원교차로~목동역교차로간 장기사용 송배수관 정비공사

나. 공 사 개 요： *******************

다. 공 사 기 간： 2021.6.14. ~ 2021.11.10.

라. 도  급  액： ************

마. 계약상대자： **************

2. 실정보고 내용

가. 기존 상수도관 폐쇄(충진) 검토

1) 현황 및 문제점

가) 당초 우리 공사는 기존 상수도관을 철거(D400~600㎜, L=284m) 및 폐쇄(D=600㎜, L=181m)토록 설계되어 있었으나, 송배수관 부설 시 철거작업을 병행할 경우 대규모 단수가 발생할 수 있어 기존관의 철거가 어려운 실정이므로, 당초 철거구간에 대해 폐쇄 또는 충진으로 변경할 필요가 있음.

- (당초) 철거 D400~600㎜, L=284m

- (변경) 폐쇄 D400㎜, L=50m, 폐쇄 또는 충진 D600㎜, L=234m

2) 공단 실정보고 내용

가) 기존 상수도관 폐쇄(충진) 검토

- 송배수관 부설 시 철거작업을 병행할 경우, 대규모 단수가 발생할 수 있으므로, 당초 철거구간에 대해 폐쇄 또는 충진으로 변경하여 시공하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

· 철거폐쇄 계획도

3. 사업소 검토 의견

가) 기존 상수도관 폐쇄(충진) 검토

- 당초 설계에는 기존관(D400~600)을 철거(L=284m)/폐쇄(L=181m)으로 계획이었으나, 현장 상황에 따라 기존관을 철거할 수 없는 실정이므로 아래와 같이 조치하고자함.

· (당초) 철거 D600㎜, L=234m → (변경) 폐쇄(충진) D600㎜, L=234m

· (당초) 철거 D400㎜, L=50m → (변경) 폐쇄 D400㎜, L=50m

4. 조치 의견

실정보고에 대한 검토결과를 공단에 통보, 이를 이행토록하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  서울시설공단 실정보고서 1부.  끝.