문서번호	도로보수과-9439
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조순형		김순수	10/25 代김순수
협 조

2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 작업지시(7차) 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

북부도로사업소

(도로보수과)

2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

작업지시(7차) 시행계획 보고

우리사업소에서 시행중인 「2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)」와 관련 경찰청 규제사항에 대한 정비계획을 보고 드림.

▢ 사업개요

∘ 공 사 명 : 2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

∘ 공사기간 : 2021. 4. 2. ~ 12. 31.

∘ 공사개요 : 차선도색 177,160m, 차선제거 8,150m,

도로표지병 설치 및 제거 28개

∘ 총공사비 : ************************************************

∘ 도 급 자 : ***************

▢ 7차 작업계획 내용

∘ 작업기간 : 2021. 10. 25. ~ 12. 10.

∘ 작업위치 : 강북구 SK북한산시티 삼양동자치회관교차로 등 19개소

∘ 정비규모 : 차선도색 10,175m, 차선제거 6,009m

※ 작업지시서 참조

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	기작업지시금액 (1~5차)	계략공사비 (6차 작업)	7차 작업	잔 액	비고
도급비	543,622	279,470	135,720	83,968	44,464
관급비	153,282	91,252	49,902	-	12,128
합계	696,904	370,722	185,622	83,968	56,592

∘ 정비수량 현황

(단위: m)

구분	공사 개요	기작업완료 (1~5차)	6차 작업 (진행중)	7차 작업	잔 여	비고
차선도색	177,160	103,461	59,571	10,151	3,953
차선제거	8,150	7,086	871	6,009	-5,816	정산 시 변경

▢ 조치계획

∘ 상기 작업계획 물량을 「2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)」 에 작업지시하여 정비하고 추후 시공물량 정산 및 설계변경 시행하고자 함.

붙  임  1. 작업지시서 1부.

2. 계략공사비내역서 1부.

3. 위치도면 1부.  끝.