문서번호	급수운영과-17415
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
급수관리팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
류태현	이용구	10/25 박병성
협 조

『신림6배수지 내부방식 공사』

준공기한 연기 검토 보고

2021. 10.

남부수도사업소

(급수운영과)

『신림6배수지 내부방식 공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 시행중인「신림6배수지 내부방식 공사」와 관련하여 감독기관인 서울시설공단으로부터 준공기한 연기 검토 보고서가 제출되어 검토 사항을 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 신림6배수지 내부방식 공사

○ 공사개요 : 도막식 6,620㎡, 패널식 7,440㎡.

○ 공사기간 : 2020. 08. 25. ~ 2021. 11. 02.

○ 공 사 비 : **************

○ 계 약 자 : *****************

□ 공사추진 현황

○ 공정율 : 80%[2021.10.22. 기준]

○ 작업완료 사항

- 신림6배수지(2지) 도막식, 패널식 방식공사 완료

- 신림6배수지(1지) 도막식 방식공사 완료

○ 잔여작업 사항 : 신림6배수지(1지) 패널식 방식공사

□ 준공기한 연기사유

○ 신림6배수지(2지) 시공후 담수, 수질검사, 통수로 인해 20일 지연됨

- ‘21년 5월 12일 ~ 31일 : 20일 지연(작업일보 확인)

※ 2지 공사완료 4월23일, 양생7일 및 시방서상 담수기준 기간 제외

○ 발주청 추가 작업지시에 의한 공사 지연 32일

- 환기구설치 2개소 추가 : 9일×2개소 = 18일(수목이식, 철거/재설치등)

- 신림6배수지 출입구, 독산배수지 도막방식 추가(364㎡) : 14일

○ 기상상태에 따른 공사지연 8일

- ‘21년 8월~9월 우천으로 인한 작업불가 : 8일(첨부 기상자료)

※ 우천시 시방서 기준 작업중지(대기습도 80%이상인 경우 내부건조 불가)

□ 검토 결과

○ 도급자가 제출한 상기 항목의 소요일수는 적정한 것으로 판단됨

○ 위 사항으로 당초 준공일인 2021년 11월 2일내 전 공정완료 및 준공이 불가한 실정이므로, 공사 지연일수인 59일 내에서 준공기한을 연기하여 잔여공종 완료 및 준공처리에 만전을 기함이 타당함.

□ 준공기한 연기

○ 연기 기간 : 59일

구 분	공 사 기 간	지체상금 부과 여부	귀책사유
당 초	2020.08.25.~2021.11. 02.	미 부 과	도급사 책임 사유 없음
변 경	2020.08.25.~2021.12. 31.

- 상기와 같이 준공기한 연기가 필요하므로 준공기한을 59일 연기하여 공사

추진에 만전을 기하고자 함

□ 행정사항

○ 준공기한 연기 승인 : 서울시설공단에게 통보

○ 행정지원과 준공기한 연기 의뢰

따로붙임 : 1. 준공기한 연기검토 보고서 제출 1부.

2. 준공기한 연기검토 보고 1부.

3. 신림6배수지 내부방식공사 공기연장 실정보고 제출의 건 1부.  **