투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[동부간선도로확장(2공구) 전기공사]

우리 부에서 진행 중인 「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

- 공 사 명 : 동부간선도로확장(2공구) 전기공사

- 계약금액 : ********************

- 공사기간 : *****************************

- 계 약 자 : ******

나. 변경계약 내용

차수	계약금액(원)		준공기한
	당 초	변 경	당 초	변 경
총차	**************	변경없음	2008.12.29.~ 2021.10.31.	************ ***********
10차	***********	변경없음	2021.05.04.~ 2021.10.31.	************ ***********

- 준공기한 연기사유 : 선행공정(토목)의 계획변경(캔틀레버 옹벽철거 추가작업)으로 인함

붙 임  1. 검토보고서 1부

2. 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	임재욱		시책사업과장	장재순		설비부장	10/25 김호성
협조자
시행	설비부-15067	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8650	/전송	02-3708-8659	/	elecpower@seoul.go.kr	/	부분공개(5)