투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	(하남선 1-1공구)관급자재 납품기한 연장 요청

우리 부에서 시행중인 『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』관련, 관급자재에 대해 납품기한 연장을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

■ 납품기한 연장 내용

- 납품기한 : (당초)`21.10.30 ⇒ (변경)`21.12.31.

- 대    상 : 레미콘, 아스콘

납품요구번호	물품식별번호	품 명	규 격	단위	수 량
					계 약	기납품	잔 량
12-21-1-36036-00	22600687	레미콘	25-18-150	m3	1,784	1,416	368
	22600695		25-27-150	m3	1,500	688	812
12-21-1-12807-00	23783801	아스콘	BB-2, 가열, 3등급	ton	884	789	95
	23783992		BB-2, 가열, 3등급	ton	1,327	1,128	199
12-21-1-10843-01	23783817	아스콘	WC-3, 가열, 1등급	ton	442	341	101
	23793797		WC-5, 가열, 3등급	ton	531	504	27
	23784008		WC-3, 가열, 1등급	ton	664	-	664
	23783988		WC-5, 가열, 3등급	ton	796	796	-

끝.

	도시철도토목부장
주무관	한재호		토목1과장	허동		도시철도토목부장	10/26 최병훈
협조자	주무관	이형일
시행	도시철도토목부-11725	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-772-7126	/전송	02-772-7306	/	jh1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)