문서번호	교량안전과-16140
결재일자	2021. 10. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
신익현		위성환	10/26 조현석
협조

- 2021년 마포대교 보수공사 -

추가손상 보수를 위한 낙찰차액 활용계획 검토 보고

2021. 10.

안 전 총 괄 실

(교 량 안 전 과)

- 2021년 마포대교 보수공사 -

추가 손상 보수를 위한 낙찰차액 활용계획 검토 보고

2021년 마포대교 보수공사중 확인된 바닥판 열화 및 방수층 손상부 보수와 건설현장의 건설일용근로자의 사회 보험료 반영(‘21.7.1.이후 적용)을 위해 소요되는 예산의 반영을 위해 총사업비 범위내에서 낙찰차액 등의 활용 계획을 검토하여 보고 드림.

□ 관련근거

○ 시설비 및 시설부대비 낙찰차액 사용관련 안내[예산담당관-4883호(2020.4.3)]

- 동일 단위사업 내 세부사업 간 동일 편성목으로 예산변경 사용 가능

○ 고용개선지원비(사회보험료 지원) 반영관련 유의사항 안내[건설혁신과-9143호(2021.7.27)]

- 집행잔액 또는 낙찰차액 등 활용

○ 실정보고 및 준공기한 연기 검토보고[교량안전과-15764호(2021.10.19)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 마포대교 보수공사

○ 공사규모

- 절삭후 아스팔트덧씌우기 158.67a

- 교면방수 11,655㎡, 상판보수 10㎡, 유공관 및 성형줄눈 1,116m 등

○ 공사기간 : `21.5.10.~`21.12.5.

○ 공 사 비 : 1,789백만원(도급비1,258, 관급비400, 이전비131)

○ 시공사/사업관리 : ㈜대한하이텍건설  / ㈜동명기술공단 외 2개사

□ 예산 집행현황

구 분	예산액 (천원)	총 공 사 비(천원)				낙찰차액 등(천원)	비고
		계	도급비	관급비	이전비
시설비	*********	*********	*********	*******	*******	*******

※ 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 마포대교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 손상보수 및 고용개선비 반영

○ 추가 손상보수

- 추가보수 사유

: 보도 정비공사시 기존 포장면 절삭후 확인결과 방수층의 손상으로 인한 슬래브 열화가 발생하여 시설물의 내구성, 안전성 확보를 위해 손상부의 보수 필요

- 보수내용

구 분	수량	단위	보 수 현 황				비 고
			완 료	잔량	추가보수	예상액(천원)
계						*******	보수구간 조정
절삭후 덧씌우기(차도)	******	a	******	*	*
절삭후 덧씌우기(보도)	*****	a	*****	*****	*
교면방수	******	㎡	******	*	*****	******
상판보수(t=30㎜)	***	㎡	*	*	***	******
유공관 및 주입줄눈	*****	m	*****	*	*****
부대공 등	*	식	*	*	*	******

○ 추가공종 반영

- 교면방수 2,048㎡, 상판보수 150㎡, 유공관 및 주입줄눈 1,260m

상세도(마포대교 보도부 포장)

데크

←마포

여의도→

- 손상현황

********	*************************************	*
상판열화	잔여포장면 파손	방수층 손상

○ 고용개선지원비(사회보험료) 지원 – 2023.12.31.한시적 적용(시조례)

구 분	주휴수당 (기시행)	금회 반영		비 고
		건강·연금 지원	고용개선 장려금
지급시기	2020. 7. 1.	2021.7.1.	2021.7.1.
지원대상	건설일용근로자(주5일)	35세 미만 청년층, 저임금(월224만원 미만) 노동근로자	고용실적 우수 사업자 (내국인 고용 90% 이상 사업장)
정산방법	직·노x원가반영비율x1.4	8 ~ 12일 : 60% 13일 이상 : 80%	주휴수당 정산액 x [상시고용비율 /상시고용 평균비율 -1]x(1/2)

□ 소요 예산 검토결과

○ 소요 예상액 ************

구분	산 출 개 요	금 액		비고
합 계		*******
1	고용개선 지원비 반영	*****
	***************************************************** **************************** ******************************************************************************
2	교면 상판보수	******
	************************************ ********************
3	교면방수		******
	******************************************** *******************
4	제경비 반영		******
	********************

※ 작업 완료후 실측 수량의 정산 반영 등에 따라 위 사항은 조정될 수 있음.

□ 조치계획

○「2021년 마포대교 보수공사」의 고용개선 지원비 및 추가 보수시행 등에 따른 부족예산은 낙찰차액을 활용하여 우선 정비를 시행토록 하고 추후 설계시 정산 반영토록 조치 하고자 함.

- 부족예산 확보계획

(단위 : 천원)

예 산 현 황			부족예산 (낙찰차 활용)	집행잔액
총사업비	공사비 등	낙찰차액
*********	*********	*******	*******	******

※ 공사비 : 도급비+관급비+이전비

붙임 : 관련 공문 및 방침서 등 3부.   끝.