문서번호	시설관리과-25382
결재일자	2021. 10. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
유강현		유광창	10/26 송병욱
협 조

단수계획 검토보고

(중화동 294-9외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2021. 10.

동부수도사업소

(시설관리과)

중화동 294-9번지 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사 시행 중 배급수관 개량공사와 관련한 단수승인 요청에 대해 아래와 같이 보고 드림.

2021. 10. 26.

보 고 자 : 지방시설주사보  성명 : 유 강 현

공사현황

❍ 위    치 : *************************(5구간)

❍ 공 사 명 : 중화동 294-9외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

❍ 공사개요 :  *******************

❍ 시공업체 : ㈜진흥공영 대표****(현장대리인 ***)

❍ 감 독 청 : 서울시설공단 공사감독2처 ***

단수작업계획

❍ 단수일시 : 2021.11.1.(월) 09:00 ~ 13:00(기존관 및 분기관로 연결 6시간 단수)

❍ 단수지역 : ********************************

❍ 단수사유 : 장기사용 배급수관(1985/DCIP) 개량공사 시행에 따른 단수

위치도

❍ 공정별 단수작업 세부계획

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	60분	***********
기존관연결	120분	****************
기존관절단	60분	**********
배관이설 및 밸브연결	120분	***************
합 계	360분(6시간)

❍ 홍보계획

- 상수도 홈페이지를 통한 인터넷 홍보

- 단수지역내 가가호호 단수안내문 부착

- 단수시 가두방송을 통한 현장 안내

검토 및 조치의견

❍ 단수작업 계획에 따른 검토결과 반드시 단수가 수반되는 공사이므로, 단수시간(4시간) 내에 작업이 완료될수 있도록 시공업체 및 감리감독자에게 통보코자 하며 통수후에도 수질관련 민원발생이 최소화되도록 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 1. 단수 ·통수 및 수계전환 업무지침 1부.

2. 단수계획서 및 홍보문 1부.  끝.