문서번호	설비부-15156
결재일자	2021. 10. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
박성수	장병선	10/26 김호성

「마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계공사」

실정보고 사항 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계공사」

실정보고 사항 검토보고

건설사업관리단이 제출한『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계공사(2차, 3차)』의 주관사업부서 요청 사항 반영 및 보험료 정산 등에 따른 실정보고를 검토하고 보고드림.

□ 공사개요

○	사업명	:	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계공사
○	공사규모	:	지하4층 ~ 지상8층, 연면적 21,628.58㎡
○	건설사업관리단	:	㈜토문엔지니어링건축사사무소, ㈜희림종합건축사사무소
○	계약상대자	:	한국플랜트서비스 주식회사, 백옥건설 주식회사, 주식회사 동우방재, 주식회사 대명기전
○	계약현황

차수	계 약 금 액	계 약 기 간	비고
총차	7,994,175,000	’18.10.16.~’21.10.30.	-
1차	73,387,000	’18.10.16.~’20.12.31.	준공(’20.12.4.)
2차	4,212,010,000	’20.05.29.~’21.10.30.	-
3차	3,708,778,000	’21.07.27.~’21.10.30.	-

□ 관련근거

○ 기계설비공사 설계변경 검토보고[토희마CM-802(’21.10.26.)호]

□ 검토내용

○ 변경사유

- 주관사업부서 요청에 따른 설계변경

- 설계 미비사항 보완(우수 및 영구배수 유량계 설치 등)

- 사회보험료, 고용개선지원비, 물가변동에 따른 조정금액의 준공정산

○ 주요변경사항

- 2차

구분	변경내용	금액증감 [단위 : 원]
계	*	***********
주관부서 요구사항 반영	****************************** ********************* ****************** *************************	*********
설계 미비사항 보완	*********************** *************************** ******************************* ***************	**********
보험료 정산	*********************** **************************	***********
물가변동 정산	**********************	**********
고용개선지원비 정산	*********************	*********
제경비 적용	******************** ******************************	***********

- 3차

구분	변경내용	금액증감 [단위 : 원]
계	*	***********
주관부서 요구사항 반영	*********************** ***************************** *************************** **********************	**********
설계 미비사항 보완	***************************** ****************************** ********************* ******************************* ******************* *****************	**********
보험료 정산	*********************** **************************	***********
고용개선지원비 정산	***********	***********
제경비 적용	******************** ******************************	********

○ 계약변경 내역

[단위 : 원]

구분	변경전	변경후	증감	비고
총차	*************	*************	***********	**** *****
2차	*************	*************	***********	*
3차	*************	*************	***********	*

○ 건설사업관리단 검토의견

- 시공사가 제출한 실정보고 사항을 검토한 결과 내역변경에 대한 설계사 의견, 단가 적용 및 제비율 적용이 적정하고, 보험료, 물가변동, 주휴수당의 정산에 대한 증빙자료가 적정하여 설계변경이 적합하다고 판담함.

□ 검토결과 및 조치사항

○ 건설사업관리단이 제출한 실정보고 사항 등을 검토한 결과 변경 사유 및 변경근거, 단가적용 및 각종 보험료 등 준공 정산에 관한 증빙서류가 적정하므로 승인하고 총무부에 계약변경 요청하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.  끝.