문서번호	한양도성도감-9501
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
박지연		이원재	10/27 백운석
협조

「21년도 한양도성 안내판 설치 및 정비」 설계변경 검토 보고

2021. 10.

한양도성도감

(문 화 본 부)

「21년도 한양도성 안내판 설치 및 정비」

설계변경 검토 보고

「21년도 한양도성 안내판 설치 및 정비」관련기관 협의 지연 및 우천 등으로 인해, 용역기간을 연장하여 추진하고자 함.

□ 계약개요

○ 계 약 명 : 21년도 한양도성 안내판 설치 및 정비

************************

*************************************

***************************

□ 추진경위

○ ’21. 7. 29. : 용역 계약

○ ’21. 8.      : 안내판 디자인 작업

○ ’21. 9.      : 현장조사

○ ’21. 10.     : 관련기관 협의

□ 설계변경 내용

○ 용역기간 변경

구 분	변경 전(당초)	변경 후	증 감	비 고
****	***************************	***************************	*****	*

********

***********************************************

붙 임 : 1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.