문서번호	행정지원과-20897
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
이선영	김미란	10/27 이영세
협 조

「온라인 수질연속자동감시시스템 제작구매 설치」 종합시운전 계획서 검토 결과 보고

2021년 10월

강남수도사업소

행정지원과

「온라인수질연속자동감시시스템 제작구매 설치」

종합시운전 계획서 검토 결과 보고

[온라인 수질연속자동감시시스템 제작구매설치] 계약과 관련하여 접수된 종합시운전 계획서에 대해 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고 함

□ 사업개요

○ 사업명: 온라인수질연속자동감시시스템 제작구매 설치

○ 사업기간: 2021. 5. 4. ∼ 2021. 11. 3.

○ 계약금액: ***************************

○ 계약업체: (주)컴버스테크

○ 구매설치 내용: 수질연속자동감시시스템 14개소

□ 검토 내용

○ 관련문서: COM_*******001(2021.10.22.), COM_*******001(2021.10.27.)

○ 종합시운전 계획

- 주요 일정

구 분	기 간	비고
측정기 시운전	2021. 8. 12. ∼ 2021. 8. 20
종합시운전	2021. 10. 5. ∼ 2021. 10. 22.
정도검사	2021. 8. 17. ∼ 2021. 9. 14.

- 주요 내용

· 시운전 기간 내에 정상적인 가동상태 확인 및 정도검사 합격

· 종합시운전 중앙서버로 데이터 전송 확인

· 정도검사 부적합 시 즉시 신품의 측정기로 교체하는 등의 조치 실시

○ 운영교육 계획

- 일정: 2021. 10. 26.(화)

***********************

○ 교육 내용

- 유지관리 및 운영방법

**************************

· 디지털수압계 작동원리 및 운영 방법

· 통신 Gateway 기능 및 특징 설명

- 이상 발생 시 복구 방법 및 긴급 조치사항

- 기타 운영 및 기술적 사항

· 측정기 소모품 교체 주기 및 방법 설명

· 통신 Gateway 운전시의 주의 사항 설명

□ 검토결과

○ 계획서 및 운영교육에 대한 검토결과 일정 및 주요내용이 적절하여 승인통보하고자 함

붙임 – 1. 종합시운전 계획서 제출의 건 1부

2. 종합시운전 계획서 1부

3. 운영교육 계획서 제출의 건 1부

4. 운영교육 계획서 1부. 끝.