투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(최초침전지 5계열 슬러지수집기 제작·구매·설치)

1. 「설계변경 보고(최초침전지 5계열 슬러지수집기 제작·구매·설치」(시설보수과-3651호, 2021.10.21.)와 관련됩니다.

2. 『최초침전지 5계열 슬러지수집기 제작·구매·설치』와 관련하여 다음과 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 최초침전지 5계열 슬러지수집기 제작·구매·설치

나. 계약금액 : **********************

다. 계약기간 : 2021. 6. 3. ~ 12. 30.

라. 계약업체 : ************************************

마. 변경사유 : 자재 변경에 따른 금액 변경

바. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감
*******	*************	*************	**************
****	2021.6.3.~2021.12.30.	2021.6.3.~2021.12.30.	변경없음

사. 예산과목 : (235-401-01)

자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비 – 수처리 유지보수

붙임  1. 방침서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	박성욱		시설팀장	김정선		시설보수과장	10/25 조선행
협조자	주무관	황선철
시행	시설보수과-3684	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)