“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	보건행정과-16272		주무관		건강증진팀장		보건행정과장		보건소장
			임소연		한선		심한석		10/28 代심한석
등록일자	2021.10.27.
결재일자	2021.10.28.
			협조자
공개구분	부분공개(5)
				보건행정팀장		임경수

		세곡보건지소 설립 실무 TF추진단 회의 결과보고

보건행정과-13682(2021.9.10.)호와 관련하여 세곡보건지소 설립 추진을 위해 세곡보건지소 설립

실무 TF추진단 회의를 개최하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

구  분

회의내용

일  시

2021. 10. 5.(화) ∼ 10. 26.(화), 총 8회, 14:00∼ 17:00

장  소

세곡보건지소 공사현장, 강남구보건소 3층 회의실

참석자

세곡보건지소 설립 실무 TF추진단(붙임 명단 참조)

회의

내용

1		2021년 세곡보건지소 설립 추진일정 공유

구 분		실행업무(월)
		8월	9월	10월	11월	12월
시설	보건지소 내부 인테리어 공사 발주	원인행위 완료 주민자치과 공사 발주
	내부인테리어 공사
	인테리어 가구(사무용가구 포함)			업체 계약	준공후 배치
	만성질환 의료기기 구매(LDX 혈액검사기 등 총 11종)	계약 완료			납품
	보건지소 홍보 계약	계약 완료			홍보 준비		홍보 활동
	세곡보건지소 행정차량 조달구매	등록 완료
	재활운동장비 구매(일반경쟁입찰)	견적서	방침 수립	공개입찰 진행
	노트북(1대), PC(14대), 복합기(2대)	전산정보과에서 보관			개소3주전연락

구 분	실행업무(월)
	8월	9월	10월	11월	12월

조직 인력	1차 채용 - 일반임기제공무원(운동처방사) 1명	방침 수립	채용 진행	10.1.임용	사업운영시스템 구축, 개소준비
	2차 채용 - 시간선택제임기제공무원 총 6명 (의사(1),간호사(1),영양사(1),운동처방사(2) 행정지원-재공고(1))			방침수립	채용 모집 진행
사업	2022년 예산편성 계획
	사업별 세부운영 방안 모색
	2021년 세곡보건지소 총괄 방침 수립
	세곡보건지소 설치에 대한 구민 홍보
	지역사회 현황분석, 수요조사
세곡보건지소 개소					11.15. 준공완료	12.6. 준공식

2		세곡보건지소 공사현장 점검 및 기타사항 협의

□ 일 자: 10.5.∼10.26. 총 8회, 14:00∼17:00

□ 협의 대상: 건설시공사(S&B), 인테리어 공사 업체(금강 TDC), 재활운동장비업체           (하스피), 방송시스템 공사업체, 건축과, 주민자치과, 총무과

□ 내 용

- 화상교육실(스튜디오 강남), 교육실 영상 및 음향시스템 구축 협의

‧ 영상 및 음향시스템 구축 정책홍보실 자문

- 디지털 기능 운동기구의 대형 스크린 설치를 위한 벽체 고정 인테리어 협의

- 인테리어 가구 색상, 마감재 점검 및 변경사항 건축과 협의

‧ 루바스크린, 제작가구 마감재, 규격 및 색상 확인

‧ 휴게실 내 싱크대 추가 제작 건축과 협의

‧ 휴게실, 열린쉼터 콘센트매립형 테이블 변경 건축과 협의

‧ 스마트운동실 천정 유공흡착보드 마감재 변경 건축과 협의

- 사인물 관련 주민자치과, 건축과 협의

- 시간선택제임기제 공무원 신규 채용 총무과 최종 협의(21.10.5.)

‧ 가급-의사 1명, 라급-간호사 1명, 운동처방사 2명, 마급-영양사 1명, 행정지원     및 홍보 1명

- 보건지소 홍보 계약 내용 검토

‧ 홍보 용역업체(인크리에이티브) 6월 계약건으로 과업내용 및 홍보 시기 확인

‧ 버스광고, QR이벤트(강남사랑상품권), 리플릿, 포스터 등 제작

- 사무용가구, 인테리어 가구 공간 배치 구성 협의

‧ 교육실 책상, 의자, 이동카트 구매계획 수립

‧ 사무용 가구 조달 구매 예정

3		인력별 채용시기(안)

구분	임용일	채용인원	채용분야	비고
1차	21. 10.1.	1명	일반임기제7급 - 운동처방사 1명	운영시스템 구축, 준비
2차	22.1.3.(예정)	6명	시간선택제임기제(가급) - 의사 1명 시간선택제임기제(라급) - 간호사 1명 시간선택제임기제(라급) - 운동처방사 2명 시간선택제임기제(마급) - 영양사 1명, 행정지원 및 홍보분야 1명	신규채용 방침 수립(21.10.19.) 채용모집(21.11.∼12.) 임용 및 운영준비(22.1.)

예 산

□ 소요예산 : ****************

□ 산출내역

내 용	소요예산	비 고
세곡보건지소 설립 실무 TF추진단 간담회비 지출	*********

□  예산과목

- 보건행정과, 건강증진, 보건소 운영지원, 세곡보건지소 설치․운영, 업무추진비,시책추진업무추진비

향후

계획

□ 세곡보건지소의 개소 완료까지 실무 TF 추진단 회의를 통한 지속적인 논의

□ 세곡보건지소 총괄 운영 계획 수립

□ 세곡보건지소 2022년 예산편성(8월부터 진행중)

□ 사무용 가구, 인테리어 가구 구매(조달구매, 수의계약)

□ 재활운동장비 계약·구매

□ 만성질환관리 의료기기 물품 납품 검수

□ 운영물품 구매

□ 시간선택제임기제 공무원(6명) 채용

관련

사진

구청 방송시스템 확인	인포데스크(21.10.26.)	홍보 계약 내용협의
전자칠판 (역삼 어르신 건강관리센터)	인테리어 제작가구 협의	스마트운동실 및 복도(21.10.26.)

붙임  1. 세곡보건지소 설립 실무 TF추진단 운영계획 1부

2. 세곡보건지소 설립 실무 TF추진단 명단 1부.  끝.

여기에 본문을 입력하세요