문서번호	토목부-20002
결재일자	2021. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김현중	代홍현기	10/29 임춘근

건설사업관리 준공기한 연기 검토 보고

≪탄천·한강변 정비 및 보행교 기본 및 실시설계≫

2021. 10.

도시기반시설본부

(토목부)

건설사업관리 준공기한 연기 검토 보고

≪탄천·한강변 정비 및 보행교 기본 및 실시설계≫

중지된 건설사업관리 용역에 준공기한 도래에 따른 준공기간 연기 요청에 대한 검토 보고 드림.

□ 관련규정

○ 건설기술진흥법 시행령 제57조(건설사업관리 대상 설계용역)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제10조(발주청, 건설사업관리기술인, 시공자, 설계자의 기본임무)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 탄천·한강변 정비 및 보행교 기본 및 실시설계 건설사업관리

○ 위    치 : 탄천 삼성교 ~ 한강 합류부 일대

○ 용역규모 : 하천정비(국제교류복합지구 주변 탄천·한강 합수부 일대 63만㎡), 탄천보행교 신설(폭 15m, 연장 280m)

○ 계약기간 : 2020. 10. 27. ~ 2021. 11. 1.

○ 계약금액 : *********

○ 설 계 사 : ㈜유신 외 2개사

□ 추진경과

○′20. 2.       : 탄천,한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 시행

(동남권사업과)

○′20. 6. 5.    : 실시설계 감리용역 의뢰(동남권사업과⇒도기본)

○′20. 10.      : 실시설계 감리용역 수의계약(유신)

○′21. 1.       : 기본설계 VE시행(동남권사업과)

○′21. 5.       : 기본설계 보완

○′21. 8.       : 용역일시중지(~′21. 12. 31. 까지)

□ 검토사항

○ 연장기한

당초 계약기간	변경 계약기간
’20. 10. 27. ~ ’21. 11. 1.	’20. 10. 27. ~ ’21. 3. 31.
	※용역중지기간 : ’21. 8. 2. ~ ’21. 12. 31.

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 : 미부과

○ 연기 사유

- 서울시 동남권사업과에서 시행 중인 「탄천·한강변 정비 및 탄천 보행교 신설 설계용역」이 일시 중지됨에 따라 이와 관련된 건설사업관리(설계감리)사업도 일시 중지 된 상태임

- 당초 계약기간 상 준공기한이 도래함에 따라 준공기한 연기가 필요함.

□ 검토결과

○ 서울시 동남권사업과에서 시행 중인 「탄천·한강변 정비 및 보행교 설계용역」이 일시 중지됨에 따라 이와 관련된 건설사업관리(설계감리)사업도 일시 중지 된 상태임(토목부-15159. 2021. 8. 6.)

○ 당초 계약기간 상 준공기한이 도래함에 따라 설계 재착수 시 최적의 설계품질을 확보하기 위해서는 충분한 설계 기간을 부여해야하므로 준공기한을 연기하고자 함.

붙임  1. 관련공문

2. 합의각서 1부.  끝.