문서번호	시설과-5253
결재일자	2021. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김현태	김대영	박종수	10/29 박미애
협 조

서울숲 노후 공원등 정비사업 낙찰차액 사용 및 설계변경 검토 보고

2021.  10.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

서울숲 노후 공원등 정비사업

낙찰차액 사용 및 설계변경 검토 보고

서울숲 노후 공원등 정비사업에 사용하고 남은 낙찰차액을 사용하여 공원등을 추가로 교체하고자 함.

1		예산 집행 현황

○ 2021. 10. 27. 까지 예산 집행 현황

예산과목	재배정액	기 원인행위액	낙찰차액 및 집행잔액
서울숲 노후 공원등 정비사업	************	************	***********

○ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 응봉공원 시설물 정비, 시설비, 서울숲 노후 공원등 정비사업

2		예산 집행 계획

○ 예산 집행 방향

- 예산 범위내에서 노후 공원등 추가 교체

○ 사업대상

- 사 업 명: 서울숲 보행로 노후 공원등 개선 공사(1단계)

- 사업내용: 노후 공원등 15개소 추가 교체

공 종	당 초	변 경
공원등 교체	132개소	147개소

- 소요예산: **************************************************

- ************************************************************

3		설계변경 추진 계획

□ 관급자재 발주

○ 구매자재: 철제공원등주, LED공원등

○ 구매방법: 조달 구매

○ 제작기간: 계약일로부터 15일

□ 공사 발주

○ 설계변경 계약 발주

구 분	당 초	변 경	비 고
도급 공사비	************	************	부가세 포함
관급 자재비	*************	*************	조달수수료 포함
합 계	*************	*************

4		추진 일정

○ 2021. 11. : 공사 변경계약 의뢰 및 관급자재 발주

○ 2021. 11.	: 관급자재 검수

○ 2021. 11.	: 공사 준공

붙임: 1. 설계내역서 1부.  끝.