문서번호	시설관리과-17782
결재일자	2021. 10. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
최경철		김진성	10/29 김근태
협조

「대형 상수도관 물세척 추진」을 위한 시공 계획 변경 보고 (서초삼성가든스위트아파트~서이초교사거리)

2021. 10.

강남수도사업소

(시설관리과)

「대형 상수도관 물세척 추진」을 위한

시공계획 변경보고

본부에서 시행 중인 대형 상수도관 물세척 추진 관련 시설물 설치공사 진행 중 변경사항이 있어 아래와 같이 보고 드림.

※ 관련문서 : 강남수도사업소 시설관리과-16649(2021.10.12.)

□ 현  황

○ 공사개요 : 대형 상수도관 물세척 추진 구간 시설물 설치

- 작 업 구 : D=400/500㎜, N=2개소

- 밸 브 류 : 중간밸브(D=500㎜, N=1개소), 공기밸브(D=100㎜,

N=2개소), 퇴수밸브(D=150/500㎜, N=2개소)

○ 세척대상

- 위   치 : 서초삼성가든스위트아파트 ~ 서이초교사거리

- 규   모 : D=500㎜, L=400m

○ 위 치 도

□ 보고내용

○ 당초 서초동 1334-2번지 앞에 물세척 시행을 위해 퇴수밸브 및 공기밸브를 설치하고자 하였으나, 주변 소출수 발생 및 물세척 완료 후 통수과정에서 분기밸브 개·폐시 주변 적수발생 우려로  아래와 같이 중간밸브 및 퇴수밸브, 공기밸브 설치 위치를 변경하고자 함.

□ 조치계획

○ 서초구 관내 상수도공사 연간단가업체 ************에 작업지시하여 중간밸브, 공기밸브, 퇴수밸브 위치를 변경하여 시공하고자 함.

- 공사개요 : 중간밸브(D=500㎜, N=1개소), 공기밸브(D=100㎜,

N=1개소), 퇴수밸브(D=150/500㎜, N=1개소)

- 개략공사비 : 약 20,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지비,수선유지교체비,대형상수도관세척-41205.  끝.