투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연장 요청(신상도 지하차도 확장공사)

〇 우리 부에서 시행 중인 「신상도 지하차도 확장공사」에 소요되는 관급자재(레미콘)에 대한 납품기한 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 변경사유 : 납품기한 연기

2. 요청사항

품 명	규 격	납품요구번호 (계약번호)	납품기한		연장사유	비고
			당 초	변 경
레미콘	25-30-150	12-21-1-50460	2021.10.30	2021.11.30	정선레미콘 수급지연
	25-30-150	12-21-1-25963	2021.10.31	2021.11.30	성진레미콘 수급지연

붙임 : 관련문서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	홍민철		방재시설과장	10/29 김태중
협조자
시행	방재시설부-13754	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	mchong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)