문서번호	도시철도계획부-8806
결재일자	2019.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
최원혁		이명수	10/02 김진팔
협조	주무관		안창호
	주무관		임양수

위례선(트램) 건설사업 관련

대전시청 방문 면담결과 보고

2019 . 10.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

위례선(트램) 건설사업 관련

대전시청 방문 면담결과 보고

위례선(트램) 건설사업과 관련 대전시에서 시행중인 대전2호선 트램 건설사업의 추진현황 등을 파악코자 방문하고 결과를 보고드림

□ 면담개요

○ 일    시 : 2019. 10. 1.(화) 14:30 ~ 15:30

○ 장    소 : 대전시청 15층 트램건설과

○ 참 석 자 (6명)

- 본  부(3) : 안창호, 최원혁, 임양수 주무관

- 대전시(2) : 트램건설과 박필우 조사설계1팀장, 서창욱 주무관

- 용역사(1) : 한만수 부장

○ 내    용 : 대전도시철도 2호선 트램 건설 추진현황 파악

□  주요내용

○ 대전도시철도 2호선 트램 건설사업 개요

- 위    치 : 서대전역~정부청사~유성온천역~진잠~서대전역(순환형)

- 규    모 : 연장 36.6km, 정거장 35개소, 차량기지 1개소

- 사업기간 : 2014~2025년

- 사 업 비 : 7,852억원(국비 60%, 시비 40%)

○ 추진현황

- ’14.12. : 대전도시철도 2호선 트램 건설방식으로 결정

- ’16.10. : 기본계획 승인 신청(국토부) /  ’18.01.~ : KDI 타당성 재조사

- ’19.01. : 예비타당성조사 면제 대상사업으로 확정

- ’19.05~06 : 기본계획 공청회 및 의회 의견청취

- ’19.10월말 : 기본계획 승인 신청 예정(국토부)

○ 주요 면담내용

- 대전 트램 노선은 대부분 6차로 구간으로 버스중앙차로와 유사한 형태로 계획

- 차량은 무가선 저상트램으로 배터리 여유공간 등을 고려하여 5모듈 1편성으로 계획(약32m, 1회 충전 40~45km 운행)

- 요금체계는 소프트환승 체계로하여 환승역 8개소 중 7개소는 지상으로 계획하였으며, 1개소만 현장 여건 등으로 지하로 계획

※ 정거장을 개방식으로 할 경우 무임승차가 우려되나, 폐쇄식의 운영비․관리비가 무임승차 비용보다 과다 소요 예상

- 차량기지는 개발제한구역에 위치하여 민원 소지가 없어 지상에 설치

- 트램 관련 기준이 없어 도시철도 기준에 따라 시설규모, 사업비 등을 계획

□  향후계획

○ 대전시 트램 추진현황 및 사업에 반영된 내용 등을 수시로 파악하고 공유하여 위례선 사업에 참고.  끝.