문서번호	토목부-22034
결재일자	2020. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		代이성열	11/13 김용제
협조

차도 확장부 포장방법 변경 검토보고

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

2020. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

차도 확장부 포장방법 변경 검토보고

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

『고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사』의 실정보고(차도 확장부 포장변경)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

************************************************************

****************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-291호(2020.11.11.): 실정보고(차도부 확장 포장변경)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사

□ 규    모: 고덕교 차도확장(4차로 →6차로), 교량접속 캔틸레버 보도 설치(교량 양측 각 B=2.5m)

□ 사업기간: ’19.01.18. ~ ’20.12.31.

□ 도 급 비: 1,631백만원(1차 1,564백만원)

***********************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 서울방향 차도 확장부 지하매설물 저촉으로 포장방법 변경 필요

○ 서울방향 차도 확장부에 대한 터파기 시행중 다수(￠165mm, 6공)의 통신관로가 확인됨.

○ 관리기관과 협의결과(유무선 및 현장) 관로의 여유장이 없어 심도 조정은 불가하며, 약 2~3억원(추정)의 이설비용과 공기지연이 예상됨에 따라

○ 통신관로에 콘크리트로 보강(관리기관 협의 결가)을 위한 포장방법을 변경하여 원활한 공사의 수행과 확장 도로부의 안전성 확보하고자 함.

□ 포장단면 변경 계획(안)

위치도
현 황 사 진
포 장 단면도	당 초	변 경(안)

□ 물량 및 공사비 증감 현황

○ 수량 증감내역

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
***		**	***	***	****
****	**********	**	***	***	****
**************	******	**	***	***	****
******	******	**	***	***	****
*********		**	*	****	****
***********		**	*	*****	*****	****
********		**	*	*****	***

○ 단가적용

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	산출금액	적용금액	비고
*********		*	*****	*****	****
******		*	******	******	****
********		*	*****	*****	****
********		*	******	******	****
******		*	*****	*****	****

※  신규비목 적용

▸ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 및 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

⇒ 신규 산출단가 : 협의율 적용(93.387%),  표준시장단가 : 100%적용

○ 공사비 증감현황

(단위 : 천원)

*****		****	****	***
* * *	****	******	******	******
	*****	*****	*****	****
	*	******	******	******
*****		*****	*****	*****
*******		******	******	******

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 지장물의 안전한 관리와 포장의 구조적 안정성 확보와 원활한 현장관리를 위하여 보강 콘크리트 타설이 적정하다고 판단되며(통신관로 관리주체 사전 협의됨)

○ 차도 확장부 포장 계획 변경에 대하여 실정보고 후 설계반영·조치함이 타당함.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 상기 책임건설사업관리기술자 검토의견과 같이 서울방향 차도 확장부 포장변경 실정보고 건은 적정하다고 판단되므로

□ 우선 시공사에게 시공하도록 하고, 추후 설계변경 시 반영하여 정산을 시행하고자 함.

붙임: 실정보고(차도 확장부 포장변경) 공문 1부.  끝.