투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 계약변경(수량) 요청[동부간선도로확장(2공구) 전기공사]

1. 건설사업관리단 동부2감 21-330호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 진행 중인 『동부간선확장도로(2공구) 전기공사』와 관련, 소요되는 관급자재(가로등 설비)에 대하여 아래와 같이 계약 변경(수량 변경)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약변경(수량) 요청내역

납품요구번호	물품식별번호	품 명 (규격)	당 초	변 경	수량 증·감	납품기한
122019399400	21780377	철제가로등주(10m, 1등용)	136	142	6	2021.10.31.
122019399400	21780379	철제가로등주(12m, 1등용)	18	10	-8	2021.10.31.
122110265100	23126605	철제가로등주(5m, 1등용)	15	12	-3	2021.10.31.
122110265000	23790257	가로등기구 보행등암	127	103	-24	2021.10.31.
122110265100	22909007	통합등주암	15	0	-15	2021.10.31.
122019293800	23305651	LED가로등기구(125W)	165	183	18	2021.10.31.
122019293800	23305652	LED가로등기구(150W)	27	15	-12	2021.10.31.
122110265200	23305736	LED보안등기구(50W)	127	121	-5	2021.10.31.

나. 변경사유 : 해당 공사의 실정보고(현장여건 등)를 반영한 관급자재 납품수량 조정

붙 임 : 관급자재 계약변경 요청 검토보고(감리단) 1부. 끝.

	설비부장
★주무관	임재욱		시책사업과장	장재순		설비부장	10/29 김호성
협조자
시행	설비부-15387	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8650	/전송	02-3708-8659	/	elecpower@seoul.go.kr	/	부분공개(5)