문서번호	기전과-9207
결재일자	2021. 11. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최민규		이태근	전결 11/01 석대창
협조

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차) 관급자재 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

남부도로사업소

[기 전 과]

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)에 필요한 관급자재에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

１		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

○ 공사업체 : ************

○ 공사금액 : ************원

○ 공사기간 : 2021.08.02. ~ 2021.11.30.

○ 공사개요

- 관내 교통사고 잦은 곳 개선을 위한 교통신호기 개선 설치

2		납품기한 연기검토

○  관급자재 구매내역

품명	규격	단위	수량	구매금액	비고
*****	***********	*	*	*********
*****	************	*	*	*********
*****	***************	*	*	*********
*****	************	*	*	*********

○ 납품기한 연기 대상 : 신호지주(디자인지주)

○ 납품기간 연기 사유

- 지주 기초 설치 후 신호지주 설치 가능하여 현재 굴착복구 일정 지연으로 기초 설치 지연됨에 따라 납품기간 연기 필요.

○ 납품기한 연기내용

- 당초 기간 : 2021. 9.13 ~11.02.

- 변경 기간 : 2021. 9.13 ~11.17.

○ 연기사유 귀책소재 : 남부도로사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 보고자 검토의견

- 지주 기초 설치기간을 감안하여 납품기한 연기를 최소화 하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

3		향 후 계 획

○ ′21.11. 17.	관급자재 납품(가로등주)

○ ′21.11. 30.	공사준공.   끝.