문서번호	기전과-12479
결재일자	2021. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정영권		이지영	11/01 代이영일
협조

『2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

실정보고 검토보고(2차 작업지시)

2021. 11. 1.(월)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

실정보고 검토보고(2차 작업지시)

2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)와 관련 감리업체로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고드림

1		관련근거

□ 2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 2차 작업지시

○ 기전과-7940(2021.7.20.), 12159(2021.10.25.)

□ 2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 1차 실정보고서 제출

○ 주식회사 트래픽스 TR-본-1004호(2021.10.27.)

2		사업개요

□ 공 사 명 : 2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

□ 공사개요 : 강남구 외 3개구 교통안전표지 신설·교체 등

□ 계약기간 : *********************

□ 계 약 자 : ************

□ 계약금액 : *************

□ 감리업체 : ************

3		2차 작업지시 내용

□ 작업내용 : 교통안전표지 신설·교체 등

□ 작업장소 : 테헤란로 204 외 73개소

□ 공사금액 : ************

□ 작업기간 : 2021. 7. 20.(화) ~ 10. 30.(토)

4		실정보고 내용

□ 주요 검토내용

번호	위 치	작업지시 사항	보고내용	감리의견	비고
1	역삼중횡단보도	좌회전유턴 신설	선행공종 미 작업으로 인한 설치 불가	적정
2	풍성로 67	비보호 신설	선행공종 미 작업으로 인한 설치 불가	적정
3	올림픽훼미리타운	정지 신설	기 작업완료	적정
4	세곡동 강남LH아파트	비보호 신설	기 작업완료	적정
5	성내로 92	비보호 신설	기 작업완료	적정
6	방이사거리	정주식 철거	선행공종 미 작업으로 인한 설치 불가	적정
7	올림픽공원남4문	정주식 철거	선행공종 미 작업으로 인한 설치 불가	적정
8	잠실동 336-8	교차로대 신설	T형부착대 변경 설치	적정
9	도곡로 163	주차금지 판 교체	기 작업완료	적정

□ 총공사비(2차 작업지시) 변경금액

구분	당초금액	변경금액	증·감		증·감액	비고
공급가액	44,813,635	41,121,004	감	-	3,692,631
부가가치세	4,481,364	4,112,101	감	-	369,262
계	49,294,999	45,233,105	감	-	4,061,893

5		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 2차 실정보고서에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적당한 것으로 판단되어 실정보고를 승인하고 추후 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  실정보고서 1부.  끝.