투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차) 관급 자재 납품기한 연기 요청

1. 기전과–9207호(2021.11.1.)와 관련입니다.

2. 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차) 관급자재인 신호등주에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 교통신호제어기 등 5종

나. 대상품목

물품분류번호	물품식별번호	품 명	규 격	단위	수량
********	********	****	***********	*	*
********	********	****	************	*	*
********	********	****	************	*	*
********	********	****	***************	*	*

다. 요청내역 : 납품기한 연기

납품기한	당초	변경	비고
	2021.11.02.	2021.11.17.

라. 귀책사유 : 서울시 (지체상금 미부과)

마. 연기사유 : 지주 기초 설치 후 신호지주 설치 가능하여 현재 굴착복구 일정 지연으로 기초 설치 지연됨에 따라 납품기간 연기 필요

바. 수량 및 금액 : 변경없음.

붙임 : 1. 납품기한 연기 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	최민규		주무관	이태근		기전과장	전결 11/01 석대창
협조자
시행	기전과-9233	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)3284-5470	/		/	부분공개(7)