문서번호	도로보수과-10318
결재일자	2021. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
맹우재		윤옥광	11/01 김영철
협 조
	주무관			이이용
	주무관			김영민

『2021/2022년 제설대책』에 따른 자동염수살포장치 신설 및 수리계획 보고

2021. 11.

서부도로사업소

도 로 보 수 과

『2021/2022년 제설대책』에 따른

자동염수살포장치 신설 및 수리계획 보고

2021/2022년 겨울철 제설대책 추진과 관련하여 자동염수살포장치 신설(남산3호터널) 및 수리(현저고가 하부)를 통하여 강설시 효율적인 제설작업을 하기 위한 검토 보고임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 재난관리기금 재배정 알림

○ 도로관리과-15100호(’21.10.28.)

Ⅱ		설 치 현 황

□ 자동염수살포장치 설치 현황(7개소)

연번	위 치	용 량 (톤)	설치년도	비 고
1	삼일대로 소파로	5	2019.12월
2	성산로(현저고가 하부)	10	2012.11월
3	성산로(금화터널~봉원고가)	10	2015.11월
4	성산로(금화터널~현저고가)	10	2016.08월
5	통일로(박석고개)	10	2017.12월
6	성산로(성산고가 하부)	5	2018.12월
7	통일로(산골고개)	10	2019.12월

Ⅲ		사 업 개 요

□ 소요예산 : 192,101,090원

□ 예산과목

○ 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비

□ 남산3호터널 자동염수살포장치(신설)

○ 위    치 : 남산3호터널 혼잡통행료관리소 일대(소공로)

○ 규    모 : L=300m

○ 소요예산 : 134,109,090원

- 자동염수살포장치 : 125,186,000원, 전기 : 8,923,090원

□ 성산로 현저고가 하부 염수살포장치(수리)

○ 위    치 : 서대문구 현저고가 하부(성산로)

○ 규    모 : 노즐 L=300m, 모터펌프 1, 분전함 교체 등

○ 소요예산 : 57,992,000원

Ⅳ		추 진 계 획

□ 남산3호터널 자동염수살포장치(신설)

○ 구매방법 : 조달구매(우수조달 물품)

품 명	규 격	가 격	업체명	인도조건	비고
눈및얼음 융해장치	저장탱크:10,000L PE배관 : 100m	85,753천원	이텍산업	현장설치도
살수기	PE배관 : 200m	38,760천원			추가 구매
조달수수료		673천원
계		125,186천원

○ 선정사유 : 조달청 우수제품으로 등록되어 있고, 현재 우리 사업소 관내에 다수 설치된 제품으로 향후 점검 및 A/S가 용이

□ 남산3호터널 자동염수살포장치 전기공사

○ 계약방법 : 수의계약 (견적 최저가)

○ 근   거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 벌률 시행령 제25조 제1하 제5호(추정가격 2,000만원 이하)

○ 업 체 명 : 일우전력 대표 이상란

○ 소요예산 : 8,923,090원

□ 성산로 현저고가 하부 자동염수살포장치 수리

○ 계약방법 : 수의계약

위 치	수 리 내 역	수 리 비 용	업체명	비고
성산로 현저고가 하부	노즐 : 300m 모터펌프, 분전함 등 교체	57,992,000원	이텍네트웍스 대표 채경선

○ 근   거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 벌률 시행령 제25조 제1항 4호 바목

○ 수의계약 사유 : 해당물품을 제조, 공급한자가 물품을 설치 정비하는 경우

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2021. 11. : 조달구매 및 수의계약 체결

□ 2021. 11월말. : 설치 및 수리 완료

첨부   1. 재난관리기금 재배정 알림 공문 1부.

2. 산출기초조사(전기) 1부.

3. 견적서(염수살포장치수리 1부, 전기공사 3부) 4부.

4. 조달물품내역(자동염수살포장치) 1부.

5. 위치도 및 현황사진 각 1부.  끝.