투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 계약 및 준공기한 연기 요청(신월IC 외 4개소 정밀안전점검용역)

1. 2021년도 예산사업으로 추진중인 “신월IC 외 4개소 정밀안전점검용역”에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회) 및 준공기한 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신월IC 외 4개소 정밀안전점검용역

나. 용역개요 : 정밀안전점검 5개소(신월IC 외 4개소)

다. 용역기간 : 2021. 4. 1 ~ 2021. 11. 26

라. 계약금액 : 금124,424,000원(금일억이천사백사십이만사천원정)

마. 계 약 자 : ㈜한국건설방재연구원  대표 김영미

바. 변경사유 : 신원IC 및 시흥IC 추가과업에 따른 계약금액 조정

사. 예산과목 :

- 교량안전과, 교량관리, 교량시설물점검관리, 교량시설물 안전점검및진단, 시설비(107,580천원)

- 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검및진단, 시설비(32,560천원)

- (추가)교량안전과, 교량시설물점검관리, 교량시설물 안전점검및진단, 시설비(41,000천원)

아. 설계변경 내역                                                  (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증・감
총 공 사 비		124,424,000	165,424,000	증) 41,000,000
도급비	공 급 가 액	113,112,727	150,385,455	증) 37,272,728
	부가 가치세	11,311,273	15,038,545	증) 3,727,272
	계	124,424,000	165,424,000	증)41,000,000

자. 준공기한 변경

- 당 초 : 2021. 4. 1 ~ 2021. 11. 26

- 변 경 : 2021. 4. 1 ~ 2021. 12. 30

차. 준공기한 연기사유 : 신월IC 및 시흥IC 추가과업에 따른 절대공기 부족

카. 지체상금 부과여부 : 미 부과

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부(설계변경 및 준공기한 연기)

5. 방침서 2부.   끝.

							시설보수과장
주무관							강연홍			시설보수과장					11/02 류태용
협조자
시행			시설보수과-4192									(						)		접수											(						)
우	07520																				/			www.seoul.go.kr
전화		2657-7975						/전송			2657-7970					/													/	부분공개(5,6)