“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	(주)신한알앤디
(경유)
제목	2021년 아리수올림터 모터펌프수리 작업지시(3차-작업기간 연장)

1. 시설관리과-18185(2021.9.27.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소와 귀사 간에 계약하여 시행 중인『2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약)』 관련하여 아래와 같이 작업기간을 변경하오니 기한 내 완료하고 그 결과(사진첨부)를 제출하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2021년 아리수올림터 모터펌프수리 작업지시(3차)

나. 작업기간

- 당    초 : 2021. 9. 27. ~ 10. 29.

- 변    경 : 2021. 9. 27. ~ 11. 12.

- 사    유 :  안정적인 펌프운용 및 유량계 작업에 따른일정 변경

다. 작업위치 : 우장산 아리수올림터(모터펌프, 유량계실 정비), 법무증압장

라. 작업내용 : 펌프수리 분해정비, 유량계실 정비, 증압장 점검구 사다리 설치

붙임  작업지시서(3차-작업기간 연장) 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	조영범		기전팀장	양창진		시설관리과장	11/02 유명은
협조자
시행	시설관리과-20800	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/		/	부분공개(7)