문서번호	교량안전과-16649
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이상문		강천수	11/03 조현석
협조

- 2021년 한남대교 보수공사 -

설계변경 및 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.11.

안전총괄실

(교량안전과)

2021년 한남대교 보수공사

설계변경 및 정산 보고

「2021년 한남대교 보수공사」에 대하여 건설사업관리단으로부터 설계변경

및 정산 보고서가 제출되어 검토하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 설계변경(제1회) 도서 제출(2021년 한남대교 보수공사)

(동기공 2021-6226호, 2021.10.25.)

□ 사업계획 변경 검토 보고(교량안전과-11248호, ’21.07.16.)

- 작업시간 변경 및 도로폭 실측 면적 적용

□ 사업계획 변경 검토 보고(교량안전과-14680호, ’21.09.24.)

- 한남대교 B램프 방호벽 보수

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : ‘21년 한남대교 보수공사

□ 규    모 : 교면포장 33.3a, LMC 포장 450㎡

□ 공사기간 : 2021. 5. 4. ~ 2021.11. 7.

□ 총사업비 : 700백만원

(도급비 524,067,240원, 관급비 78,240,000원, 이전비 15,040,000원, 낙찰차액 76,482,760원, 계약심사 절감액 6,170,000원)

□ ***********************

□ **********************

Ⅲ		설계변경 주요내용

가. 설계변경 주요사항

□ 콘크리트(LMC)포장 면적 증가분 적용 및 작업 시간 변경(주간 → 야간)

- 교통통제에 따른 관할 경찰서와의 협의 결과 작업시간 변경

- 시공성 향상 및 품질관리 확보를 위한 주·야간 연속작업

□ 아스콘 포장 구간 도로폭 실측 결과 설계와 상이하여 실측 면적 적용

- 당초 : B = 21m ~ 22m, 변경 : B = 22m

□ B램프 우측 방호벽 누수 차단을 위한 보수공사 시행

□ 각종 보험료 및 수수료 등 제경비 사후 정산 반영

나. 수량 및 공사비 변경 내역

□ 주요 공종별 수량 증․감 현황

구 분		단 위	수 량			변경 사유	비고
			당 초	변 경	증·감
1. 아스팔트 포장
1-1. 포장공	아스팔트 절단	m	84	167	83	정산 수량
	아스필트.절삭 덧씌우기	a	33.3	34.21	0.91	시공면적 증가
	방수층 제거	a	33.3	34.21	0.91	시공면적 증가
1-2.교면 방수공	교면방수	㎡	3,330	3,421	91	시공면적 증가
	유공관 설치	㎡	-	236	236	추가공사 수량증가
	성형줄눈설치	㎡	-	178	178	추가공사 수량증가
	주입줄눈 설치	㎡	33.3	260	226.7	추가공사 수량증가
1-3. 상판 보수공	상판제거.보수	㎡	15.6	-	15.6	시공 수량 정산
	폐기물 상차	㎡	100	74.53	25.47	시공 수량 정산
2. 콘크리트 포장	노면절삭	㎡	450(주간)	465(야간)	15	시공면적 증가
	워터젯 절삭	㎡	450(주간)	465(야간)	15	시공면적 증가
	폐기물 상차	㎥	40	41.84	1.84	수량 정산
	콘크리트 생산	㎥	40	41.84	1.84	시공면적 증가
	콘크리트 포설	㎥	450	465	15	시공면적 증가
3. 방호벽 보호공	방호벽 보수	m	-	140	140	방호벽 누수차단 추가 공사
5. 부 대 공	가설사무실설치	동	1	-	1	수량 정산
	차선도색	㎡	180	238.19	58.19	실 시공 수량 정산
	싸인보드	HR	64	98	34	추가시공 정산
	공사용 홍보물	EA	50	12	38	수량 정산
	중기운반비	회	6	4	2	수량 정산

□ 총사업비 증․감 내역

구 분	총 공사비 변경 현황		증·감	비 고
	당 초	변 경
1. 도급액	524,067,240	572,290,000	증) 48,222,760
2.관급자재	78,400,000	88,690,000	증) 10,290,000
3.이전비 및 기타	12,715,000	27,055,000	증) 14,340,000
총 사업비	615,182,240	688,035,000	증) 72,852,760

□ 관급자재 및 이전비 수량 증․감 내역

구 분		단 위	당 초	변 경	증· 감	비 고
관급자재	아스콘(표층용)	톤	640	724	증) 84	면적증가
이 전 비 (폐기물처리)	폐콘크리트 덩어리	톤	10	10	-
	폐 아스콘(덩어리)	톤	110	199	증) 89	수량정산
	폐 아스콘(평삭재)	톤	220	617	증)397	수량정산

다. 건설사업관리단 검토의견

□ 금회 설계변경은 기 실정보고 승인사항의 내역 반영사항으로 설계변경 도서는 관련 기준에 적합하게 작성 되었으며

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 규정에 따라 적정하게 이루어졌으므로 검토내용과 같이 설계변경을 시행하는 것이 타당 한 것으로 판단됨.

Ⅳ		조치 의견

□ 건설사업관리단에서 제출한 설계변경 검토의견서에 대해 적정한 것으로 판단되므로 설계변경(정산) 사항을 승인처리하고 계약의뢰 하고자 함.

첨부  1. 건설사업관리단 설계변경 검토보고서 1부.

2. 계약금액 검증확인서 1부.

3. 합의서 1부. 끝.