문서번호	급수운영과-18494
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정진우	박상열	11/03 김원수

공사실정 검토 보고

「홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사」

2021. 11.

서부수도사업소

급수운영과

공사실정 검토 보고

『홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 서울시설공단으로 부터 제출된 현장실정 자료 검토결과 보고임.

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2021. 05. 10. ~ 2021. 12. 05.

○ 공사내용 : ********************

○ 공 사 비 : ************

○ 시 공 사 : **************

○ 감 독 자 : *****************

Ⅱ		검토 내용

□ 사토장 변경

가. 현황 및 문제점

○ 본 공사의 잔토처리는 수도권매립지(37.57km)로 설계되어 있으나, 수도권매립지관리공사로부터의 토사반입 불가 통보(매립부-2077호)에 따라 사토장 변경이 불가피한 실정임.

○ 신규 사토장: 당초 37.57km → 변경 22.25km

(***********************)

나. 검토의견

○ 사토장 적정성 여부 검토

- 신규 사토장 현장 확인결과, 사토장으로 사용 가능한 부지(면적) 및 진출입로 확보와 개발행위 허가, 반입 동의(서) 절차 이행 등 사토장으로 사용하기 적정한 것으로 판단됨.

※ 파주시청 확인 결과, 성토 1m 미만시 개발행위 허가증은 비산먼지 발생사업 신고증명서로 대체 가능

사토장 전경

○ 사토장 운반거리에 따른 단가산출 검토

- 사토장 변경에 따른 신규단가

당초 15,579원/㎥ → 변경 12,764원/㎥

- 개략공사비: 감) 2,972천원

○ 사업소 검토의견 : 공단검토 의견 수용

□ 중간집하장 변경

가. 현황 및 문제점

○ 본 공사의 중간집하장 위치는 공사현장 반경 3km로 설계되어 있으나, 현장 주변 3km 이내에는 적합한 중간집하장 부지를 확보할 수 없어 변경이 필요한 실정임.

○ 신규 집하장: 당초 3km → 변경 10.9km

(***********************)

나. 검토의견

○ 중간집하장 적정성 여부 검토

- 현장 확인결과 토사, 폐기물 반입 및 자재적치 등 적정 부지(면적) 및 진출입로 확보 등 중간집하장으로 사용하기 적정한 것으로 판단됨.

중간집하장 전경

○ 중간집하장 운반거리 및 단가산출 검토

- 현장에서 변경 중간 집하장까지 최적 운반거리가 20.3km이나 서울시 경계까지의 거리인 10.9km를 운반거리로 적용하고 실제 시공물량을 설계변경(정산)시 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

- 단가 산출시의 운반거리, 운반속도 등의 적용은 관련기준에 따라 적정하게 산출되었으며, 변경된 중간 집하장까지의 신규공종 단가 산출은 적정하다고 판단됨.

- 개략공사비: 증)10,722천원(별첨 내역 참고)

○ 사업소 검토의견 : 공단검토 의견 수용

□ 개략공사비

구 분	당 초	변 경	증 · 감
운반거리 (현장→집하장)	3km	10.9km	증) 약10,722천원
운반거리	현장→매립지 37.57km	중간집하장→사토장 22.25km	감) 약 2,972천원
부지임대료	19,857,381원	0원	감) 약19,857천원
계	감) 12,107천원

Ⅲ		조치 의견

○ 서울시설공단 검토의견을 승인하고 추후 설계변경에 반영토록 서울시설공단에 통보코자 함.

붙임  1. 서울시설공단 실정보고서 1부.

2. 단가산출서 각 1부.

3. 관련서류(토사반입 불가 통보, 반입 동의(서), 비산먼지 발생사업 신고증명서) 각 1부.  끝.