등록번호

시민건강과-6887

주무관

어르신건강팀장

시민건강과장

보건소장

등록일자

2021.11.3.

김미경

박소정

김안순

11/03

윤영덕

결재일자

2021.11.3.

공개구분

대시민공개

협조

복지지원과장

代엄병숙

사회복지과장

이춘배

중구 치매안심센터 이전 및 조성 공사 계획

보건소

시민건강과

중구 치매안심센터 이전 및 조성 공사 계획

현재 중구 치매안심센터 건물(청구로8길 22)에 ‘어르신 헬스케어센터 건립’이 진행됨에 따라, 중구 치매안심센터를 유락복지관 11층으로 이전하여 치매 관리

사업에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 근 거

□‘어르신 헬스케어센터 건립 추진계획[사회복지과-25152호(2021.6.24.)]

【 어르신 헬스케어센터 건립개요 】

❍ 추진기간 : 2021. 6. ~ 2022. 6.

❍ 위    치 : 서울시 중구 청구로8길 22(신당동 304-733외 10필지)

❍ 건축규모 : 지하1층 ~ 지상3층(연면적 697.12㎡)

❍ 총사업비 : 1,887백만원

2		추 진 개 요

□ 이전시기 : 2021. 12월 중순경 ※ 전기·통신공사 완료 후

□ 위     치

구 분	변경 전	변경 후	비고
주 소	중구 청구로8길 22 지하1층~지상3층 [총 576㎡]	중구 퇴계로 460 유락종합사회복지관 지상 11층 [총 534.86㎡]

3		추 진 내 용

□ 유락 종합 사회복지관 지상 11층 용도 변경

변경 전(규모)	⇨	변경 후
유락도서관(331.84㎡)		중구치매안심센터(변경)
어린이 도서관(70.06㎡),		어린이 도서관(유지)
화장실 등 공용시설(132.96㎡)		화장실 등 공용시설(유지)

□ 센터 이전 조성 공사 시행

□ 추진기간 : 2021. 11. ~ 2021. 12.

□ 추진내용 : 전기·통신공사 시설 공사(콘센트 및 인터넷 회선 증설 등)

□ 계약방법 : 수의계약

□ 유락복지관 11층 정비계획 도면

□ 센터 정비를 위한 물품 구매

□ 추진기간 : 2021. 11월 ~ 12월

□ 추진내용 : 접이식 칸막이, 의자, 테이블 등 내부 집기류 구매

□ 구매방법 : 수의계약 및 품목별 조달구매

□ 센터 물품 불용처리 및 이사

□ 추진기간 : 2021. 12월

□ 추진내용 : 센터 물품 불용처리 및 물품 이전(상세품목:붙임1 참조)

□ 계약방법 : 수의계약

※ 추진일정 및 상세내용은 사업 진행 과정에 따라 변동될 수 있음.

4		소 요 예 산

□ 예산 미확보에 따른 문제점 및 대책안

□ 추경예산 미확보에 따른 문제점

- 임시회 취소로 2021년 마지막 추경은 11월 정례회 시 진행될 예정되며 예산지출 가능 시기가 2021.12.15일경으로 예상되는 바, 어르신 헬스케어센터 공사 착공예정일(2021.1.3.) 전에 센터 이전이 불가함

□ 센터 이전 및 조성에 따른 예산 확보 대책안

- 치매안심센터 예산 집행잔액 사용 : 시설비, 사무관리비, 공공운영비

- 보건분소(사무관리비) 및 사회복지과(시설비, 사무관리비, 자산취득비) 예산 사용

□ 소요예산 : 총 50,500천원[구비 100%]

예 산 과 목		산 출 내 역	금 액 (단위:천원)
편성목	통계목
합 계			50,500
일반운영비	사무관리비	◦센터 이사 비용 등 9,540,000원*1=9,540천원 ◦파티션 설치 및 물품구입 6,560,000원*1=6,560천원	16,100
시설비 및 부대비	시설비	◦전기 · 통신 공사 등 개보수 30,000,000원*1=30,000천원	33,000
자산취득비	자산 및 물품취득비	◦접이식 칸막이 설치 등 1,400,000원*1=1,400천원	1,400

□ 집행가능액 : 총 50,500천원[구비 100%]

□ 사업별 예산 현황                                       (단위: 천원)

총 합계	치매안심센터운영 (총 9,634천원)			보건 분소운영	노인 복지운영 및 확충 (총 34,400천원)
	시설비	사무 관리비	공공 운영비	사무 관리비	시설비	사무 관리비	자산 취득비
50,500	4,000	3,634	2,000	6,466	29,000	4,000	1,400

□ 편성목별 예산 현황                                     (단위: 천원)

예 산 과 목			집행 가능액	관리부서(팀)	비고
편성목	통계목	세부사업
일 반 운영비	사 무 관리비	치매안심 센터운영	3,634	시민건강과 (어르신건강팀)
		보 건 분소운영	6,466	시민건강과 (보건분소팀)	예산 변경예정 [보건분소운영 →치매안심센터운영]
		노인복지 운영 및 확충	4,000	사회복지과 (노인복지팀)
	공 공 운영비	치매안심 센터운영	2,000	시민건강과 (어르신건강팀)	예산 변경예정 [공공운영비 →사무관리비]
	총금액		16,100
시설비및 부 대 비	시설비	치매안심 센터운영	4,000	시민건강과 (어르신건강팀)
		노인복지 운영 및 확충	29,000	사회복지과 (노인복지팀)
	총금액		33,000
자 산 취득비	자산 및 물 품 취득비	노인복지 운영 및 확충	1,400	사회복지과 (노인복지팀)
	총금액		1,400
총 합계			50,500

※ 치매안심센터 공공운영비 및 보건분소 운영 사무관리비는 집행계획 변경에 따른 기획조정과 승인 후 사용

※ 시설비, 사무관리비, 자산취득비는 사회복지과 예산 일부 지원 협조

5		추 진 일 정

□ 2021. 11. : 유락종합복지관 11층 유락도서관 철거 및 소요예산 변경

□ 2021. 11. : 전기 및 통신 공사용역 체결

□ 2021. 11. ~ 2021. 12 : 공사 착공 및 센터이전 환경조성

□ 2021. 12. : 이사용역 체결 및 이전 완료

6		행 정 사 항

□ 복지지원과 : 유락도서관 철거 및 공사·이전 진행 협조

□ 기획조정과 : 예산계획 변경 승인 및 처리

□ 보건위생과 : 센터 조성 보수공사 및 이사 업체 계약

□ 사회복지과 : 소요예산(시설비, 사무관리비, 자산취득비) 일부 지원

□ 중구시설관리공단 : 전기 · 통신공사 및 이사 진행 협조

붙임 : 중구치매안심센터 이전 및 불용물품 현황 1부.  끝.