“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사실정 검토보고 회신『홍은동 364번지 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사』

1. 공사감독2처-14166(2021. 10. 28.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 제출한『홍은동 364 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사』에 따른 공사실정 보고를 검토하여 아래와 같이 회신하오니 공사감독 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

현황 및 문제점(공단 보고내용)	사업소 검토의견
○ 사토장 변경 - 본 공사의 잔토처리는 수도권매립지로 설계되어 있으나, 수도권매립지관리공사로부터의 토사반입 불가통보{매립부-2077호 (2021.8.9.)}에 따라 사토장 변경이 불가피한 실정임. - 신규 사토장 (***********************)	○ 공단 검토의견 수용
○ 중간집하장 변경 - 본 공사의 중간집하장 위치는 공사현장 반경 3km로 설계되어 있으나, 현장 주변 3km 이내에는 적합한 중간집하장 부지를 확보할 수 없어 변경이 필요한 실정임. - 신규 중간집하장 (***********************)	○ 공단 검토의견 수용

끝.

	서부수도사업소장
주무관	정진우		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	11/04 김원수
협조자
시행	급수운영과-18578	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	wjdwlsdn1123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)