문서번호	급수운영과-18398
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	급수운영팀장		급수운영과장		북부수도사업소장
서호태	이문성		이승완		11/05 박동석
협 조
	주무관					구자광

『상수도관 내부상태 조사에 따른』

수계전환 계획보고

2021. 11.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

수 계 전 환 계 획

본부에서 추진중인『상수도관 내부상태조사 및 진단용역』과 관련, 원활한 CCTV 조사를 위해 선정구간에 대한 수계전환 계획을 수립하여 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

○ 비굴착갱생관 우선조사대상 제출에 따른 수계조절등 급수운영 계획서 수립 제출【계획설계과-9091호(2021.10.28.)】

Ⅱ		용역개요

□ 용역기간: `21.03.19.~`22.03.18.

□ 과업범위

********************************************

*************************************************

□ 용역회사: 동해종합기술외 1, 서용ENG외 2

□ CCTV 조사대상(노원구, 1건)

공 사 명	주 소	구경(mm)	연장(m)	공법	비고
****************** *******	*********************	****	***	***	** *******

Ⅲ		검토내용

○ 수계전환 난이도 및 수질사고 여부 등을 고려하여 선정

○ 관로조사 시 안전사고 및 수질사고 예방 최우선 검토 후 조사실시

○ CCTV작업 투입구 위치 사전검토

○ 부서 간(본부, 사업소, 용역사) 비상연락망 구축

Ⅳ		급수구역도

****

□ 다량급수처 정보

번호	위치	건 물 명	저수조 유무	비상연락처	다량급수처 수질확인 배치(담당)	비고
-	-	-	-	-	-	해당사항 없음

Ⅳ		수계전환 계획도

① ~ ⑦

③ ~ ⑦(상세도)

※ ③번 작업구를 통하여 CCTV조사예정

□ 수계전환 순서(밸브조절 계획)

○ CCTV 조사 시행 1주전

- ①, ②, ④, ⑥, ⑦번 밸브조절(개→폐, 50%)

- 100% 지수 시까지 소출수 및 적수민원 지속적인 모니터링

○ CCTV 조사 시행 3일전

- ①, ②, ④, ⑥, ⑦번 밸브조절(개→폐, 80%)

- 단수지역 내 다량급수처 단수홍보 철저_ 본 구간 해당사항 없음.

○ CCTV 조사 시행 1일전(CCTV조사 작업준비 완료)

- ①, ②, ④, ⑥, ⑦번 밸브조절(개→폐, 100%)

- ⑤번 퇴수밸브 조절(폐→개), D700 퇴수작업(퇴수량: 202.33㎥)

○ CCTV 조사 시행일

- 다량급수처 지정담당(각 2명) 정위치_ 본 구간 해당사항 없음

- 다량급수처 수도계량기 조절(개→폐)_ 본 구간 해당사항 없음

- ③번 작업구 내에서 CCTV조사 시행

- 야간작업 시 안전사고 유의하여 작업시행

○ CCTV 조사 완료 후

- ①번 밸브조절(폐→개) 이후 ⑤번 퇴수밸브를 통해 퇴수작업

- 통수 전 수질검사 시행 및 수질확보, ⑤번 퇴수밸브 조절(개→폐)

- 다량급수처 수도계량기 통수 전 퇴수 및 수질검사 후 개방(폐→개)

(본 구간 해당사항 없음)

- ②, ④, ⑥, ⑦번 밸브조절(폐→개), 시간적 여유를 두며 서서히 조절

□ 수계전환에 따른 시설물(밸브) 담당자 지정

번호	위치	규격	설치연도	수량	조사일	이상유무	담당자
1	하계동 273-3	700mm(중간)	2019년	1	21.11.01.	이상없음	********
2	공릉동 706	400mm(분기)	2011년	1	21.11.01.	이상없음	********
3	공릉동 711-1	700/600mm(작업구)	2020년	1	21.11.02.	이상없음	********
4	공릉동 711-1	200mm(분기)	2010년	1	21.11.02.	이상없음	********
5	공릉동 711-1	250mm(퇴수)	2013년	1	21.11.02.	이상없음	********
6	공릉동 323-1	400mm(분기)	2020년	1	21.11.02.	이상없음	********
7	공릉동 323-1	700mm(중간)	2019년	1	21.11.01.	이상없음	********

□ 관계자 비상연락망

구 분	성 명	연 락 처	비 고
본부 계획설계과	***	*************	용역담당
본부 배수과	***	*************	수계조절실장
본부 배수과	***	*************	수계조절담당
사업소 급수운영과	***	*************	급수운영팀장
사업소 급수운영과	***	*************	수계조절실장
사업소 급수운영과	***	*************	지역총괄(노원)
사업소 급수운영과	***	*************	지역담당
사업소 시설관리과	***	*************	긴급상황담당
사업소 급수운영과	***	*************	지역담당
사업소 급수운영과	***	*************	지역담당
사업소 급수운영과	***	*************	수계조절반장
용역사 사업책임기술자	***	*************
용역사 현장책임기술자	***	*************

□ 향후계획

○ 본부 및 용역사와 협조하여 CCTV조사 시행일정 협의

○ 야간작업 시행으로 안전시설 설치 및 안전원 배치 등 안전사고 예방을 위한 관련업무 협의.  끝.