문서번호	시설보수과-4287
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
강연홍		전결 11/05 류태용
협조

- 목동교 보수공사(용접수량 반영 등)

실정보고에 대한 조치계획 보고

2021. 11.

강서도로사업소

[시설보수과]

목동교 보수공사

실정보고에 대한 조치계획 보고

우리 사업소에서 추진중인「목동교 보수공사」와 관련, 감독기관인 서울시설공단으로부터 제출된 용접수량 반영 등 현장실정보고 사항에 대한 조치계획 검토 보고임.

※ 관련근거 : 공사 실정보고 제출(시설공단 공사감독1처-8079호 ‘21.11.3)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 목동교 보수공사

○ 공사기간 : 2020. 6. 30 ~ 2021. 11. 30(사고이월)

○ 공사규모 : 강선보강 21개소, 교량받침교체 111개소 등

○ 도 급 비 : 1,084,369,000원

○ 도 급 자 : 비엔에스이건설(주) 대표 장태민

○ 감 독 자 : 서울시설공단(공사감독1처) 안제민

○ 예산현황 : 총공사비 1,228,000천원

	< 예산현황 >
▷공사발주: 1,103,860천원(도급비 1,093,050. 관급비 8,213. 이전비 2,597) ▷공사계약: 1,057,980천원(도급비 946,171. 관급비 109,212. 이전비 2,597) ▷설계변경 : 총1,195,383,930원[도)1,084,369,000원, 관)108,119,950원] 이전비 2,894,980원(*추가배정 잔여예산 19,821,020원) [사고이월 사업] ▷예산현황 : 당초 배정예산 1,108,000천원(재난관리기금) 추가 확보예산 120,000천원(교량안전과 재배정)

○ 현재공정 : 70%(교량받침 교체작업 완료 및 거더보강 공사중)

Ⅱ		실정보고 내용

❏ 서울시설공단 실정보고(주요보고내용 및 문제점 등)

1. 필렛용접 설계누락에 따른 작업수량 반영 필요

▸신규 교량받침 교체작업시 솔플레이트와 스틸박스거더 접합부의 용접수량이 산출서에는 포함되었으나 내역에는 누락되어 실제 작업에 따른 수량반영 필요함.

2. 솔플레이트와 스틸박스 이격부 철판 충진 반영 필요

▸목동교(신교) 스틸박스는 종구배가 발생되고 있으나 신규로 설치되는 교량받침은 수평이므로 서로 단차가 발생되어 이격부에 2mm이하의 철판으로 밀실하게 충진이 필요함.

※ 설계용역사 검토내용(에이스톤엔지니어링 2021-74호 ‘21.6.22)

▸솔플레이트 이격부는 상부구조물과 최대한 압착되도록 철판을 적층하여 심부까지 보강이 필요함

❏ 서울시설공단 실정보고(조치방안 및 의견)

1. 필렛용접 설계누락에 따른 작업수량 반영 검토

▸수량산출서 산식오류로 인해 내역에 누락된 수량이며, 실제 솔플레이트와 스틸박스거더 접합부의 용접작업을 진행하여야 하므로 실제 수량만큼 반영하는 것이 타당하다고 사료됨

2. 솔플레이트와 스틸박스 이격부 철판 충진 반영 검토

▸설계사 의견과 같이 교량받침과 스틸박스가 일체화가 되어야 하므로 이격부에 철판을 삽입하여 보강하는 것은 타당하다고 판단됨

3. 개략 물량 및 소요예산 검토

공 종	단위	당초	변경	증.감
FILLET(현장,상향)용접	M	232	505	증) 273
솔플레이트 상면충진	톤	-	0.79	증) 0.79

▸소요예산 검토 : 증) 19,125천원(부가세포함)

Ⅲ		실정보고 검토 및 조치의견

1. 서울시설공단 보고내용은 교량받침 교체시 품질향상 및 안전확보를 위한 조치방안이므로 보고내용과 같이 공사를 시행하고 추후 설계변경시 실제 수량을 반영하여 적용함이 타당하다고 사료됨.

2. 위와 같은 검토사항에 대하여 서울시설공단에 통보하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

※ 소요예산은 교량안전과 추가확보 예산을 활용하여 조치.

첨부 : 1) 관련공문 1부.

2) 실정보고 검토서 1부.

3) 변경 도면 및 산출서 1부.

4) 설계용역사 공문 1부.    끝.