문서번호	급수운영과-18630
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조은희		代김기문	11/05 김원수
협조

『2021년 서대문구 관내 상수도공사』

사토장 변경 실정보고 검토

2021. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

사토장 변경 실정보고 검토

『2021년 서대문구 관내 상수도공사』와 관련하여 시공감리 용역사인 ㈜한국종합기술로부터 사토장 변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 2021년 서대문구 관내 상수도공사

○ 공사기간 : 2021. 7. 8.~2022. 6. 30.

○ 공사내용 : D=15~300㎜, L=2,394m

○ 도 급 비 : 1,248,015,000원

○ 시 공 사 : ㈜정선토건 대표 ***

○ 감 독 자 : ㈜한국종합기술 건설관리기술인 ***

Ⅱ		실정보고 내용

□ 실정보고 건명 : 2021년 서대문구 관내 상수도공사 사토장 변경

□ 실정보고 사유

○ 당초 잔토처리장인 수도권 매립지에서 토사반입 불가 통보로 매립 가능한 신규 사토장으로 변경

- 토사 반입불가 회신【매립부-2354호(2021.9.9.)】

□ 건설사업관리용역사 의견

○ 수도권매립지 토사반입이 불가하여 신규 사토장 변경이 타당함.

□ 잔토처리비 변경 검토

구 분	사토장 업체	위 치	거 리	운반비
당 초	수도권매립지 관리공사	인천시 김포매립지	37.57㎞	15,716원/㎥
변 경	토지주: 박기백	경기도 파주시 법원읍 가야리 226-2,3,4,5,6	38.45㎞	18,946원/㎥

○ 정산시에는 변경된 금액이 아닌 종전 계약단가(15,716원/㎥)로 정산하기로 업체와 협의 함.

Ⅲ		조치 의견

○ 건설사업관리용역사 검토의견이 적정하다고 판단되므로 실정보고 사항을 승인 처리하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임  사토장 변경 실정보고 공문 2부. 끝.