문서번호	기전과-9440
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최민규		이태근	11/05 代이정호
협조

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차) 관급자재 납품수량 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

남부도로사업소

[기 전 과]

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

관급자재 납품수량 변경 검토보고

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)에 필요한 관급자재에 대하여 납품수량을 아래와 같이 변경하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

１		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

○ 공사업체 : ************

○ 공사금액 : *************

○ 공사기간 : 2021.08.02. ~ 2021.11.30.

○ 공사개요

- 관내 교통사고 잦은 곳 개선을 위한 교통신호기 개선 설치

2		납품수량 변경검토

○  관급자재 구매내역

품명	수량		구매금액	비고
규격	변경전	변경후
*****	*	*	*********
***********
*****	*	*	*********
************
*****	*	*	*********	**
***************
*****	*	*	*********
************
*****	*	*	*********	**
****************

○ 납품수량 변경 대상 : 신호지주(디자인지주)

○ 납품수량 변경 사유

- 지주 기초 설치 후 현장조사 결과 기초 설치 위치 변경으로 인한 부착대 길이 연장 필요 확인되어 기존 구매 수량 변경 후 현장 실정에 맞춰 신호지주 추가수량 구매 추진.

3		향 후 계 획

○ ′21.11.08. 조달계약 변경요청(관리단속과)

○ ′21.11.30. 공사준공.   끝.