문서번호	기전과-9442
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이정준		이정호	11/05 代이정호
협조

「동작지하차도 배수펌프 제조 및 설치」

설계변경 검토 보고

2021. 11.

남부도로사업소

(기 전 과)

「동작지하차도 배수펌프 제조 및 설치」

설계변경 검토 보고

동작지하차도 배수펌프 제조 및 납품이 완료됨에 따라 제경비 정산을 반영하여 설계변경을 시행코자 함.

▢ 추진근거

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

- 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

▢ 공사개요

❍ 공 사 명 : 동작지하차도 배수펌프 제조 및 설치

❍ 계 약 자 : *********************

❍ 공사기간 : 2021. 8.17. ~ 11. 15.

❍ 계약금액 : **********************

▢ 설계변경 내역

❍ 제경비 정산 내역조정 : 설계변경 내역서 참조

❍ 설계변경 금액

구 분	당초 계약금액(원)	변경 계약금액(원)	증/ 감액	비고
***	**********	**********	**********

⇒ 제경비 실제 정산내역 반영으로 감액 처리

▢ 보고자 의견

❍ 공사 완료에 따른 제경비(고용 및 산재보험) 실제 정산내역을 반영 하여 설계변경 시행함이 타당하며,

❍ 설계변경 후 공사 완료분에 대하여 공사비를 지급하고자 함.

▢ 향후계획

❍ 2021. 11. 8.  : 설계변경 시행

❍ 2021. 11. 12. : 공사 준공

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.