문서번호	시설개선과-8076
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
강남규		윤정한	11/05 김정열
협 조
	운영기획과장			오부태
	주무관			정승민
	주무관			백문선

『2021년 시설물유지보수공사(연간단가계약)』

집행잔액사용 설계변경 검토보고

2021. 11. 04.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『2021년 시설물유지보수공사(연간단가계약)』

집행잔액사용 설계변경 검토보고

「2021년 시설물유지보수공사(연간단가계약)」의 계약금액 소진에 따른 집행잔액을 사용하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2021년 시설물유지보수공사(연간단가계약)

□ 공사기간 : ′21.04.01 ~ 12.15

□ 공사내용 : 건축‧토목 분야 시설물 유지보수 210개 공종

□ 계약업체 : *************

□ 계약금액 : *************

Ⅱ		집행잔액 사용

□ 집행잔액 사용

◯ 연간단가 공사 공정률 98%로 공사비가 부족하여 남은 기간 건축․토목분야 유지보수가 어려운 실정으로, 긴급공사 및 내년도 행사대비 등 시설물유지관리에 만전을 기하고자 진행잔액을 사용코자 함.

□ 추가공사 계획

◯ 정밀안전진단 및 정밀안전점검 지적사항 정비

◯ 실내체육관 데크 하부 정비 및 호돌이상 철거 등

◯ 제1수영장 내부 실내환경정비

◯ 긴급을 요하는 시설물 안전예방조치를 위한 보수공사 대비

◯ 사업소 내 탈색 차선 및 노후 교통시설물 정비 등(공사범위 검토 후 시행)

□ 예산 현황(시설비) : 총 집행잔액 **************

(단위 : 원)

예산항목	예산액	계약금액	집행잔액
시설물유지보수(건축)	***********	***********	***********
주차운영본부 리모델링공사 ********************************************************************”	***********	*********	***********

Ⅲ		시설물유지보수공사 세부 내용

□ 공사시행 현황 : ************************

구 분	공 사 비	공 사 내 용	비 고
1차	********	주차운영본부 정비 및 웅비상앞 화장실 정비	1차 기성지급
2차	********	올림픽전시관 내 천장보수공사
3차	********	공공안전관 본부 내 환경정비공사 등
4차	********	구의야구공원 부설주차장 내 차선정비공사 등	2차 기성지급
5차	********	공공안전관본부 내 환경정비공사 등
6차	********	실내체육관 보조경기장 천장주변 환경정비공사 등
7차	********	웅비상 주변 측구 설치공사 등
8차	********	1수영장 2층 및 3층 창호주변 코킹공사 등
9차	********	실내체육관 정밀점검관련 균열보수공사 등
10차	********	1수영장 다중이용건축물 점검관련 2층 테라스 정비공사
11차	********	2수영장 다이빙장 남녀샤워장 내 환경정비공사 등
12차	********	1수영장 진입경사로 주변 미끄럼방지 도장공사	작업완료
13차	********	1수영장 정문옆 정화조 정비공사
14차	********	1수영장 주출입구 강화도어 및 생활체육문화교실 물받이 설치공사
15차	********	1수영장 다이빙대 주변 안전그물망 설치공사 등
16차	********	효창운동장 내 환경정비공사(누수보수 및 화장실 정비)
17차	********	실내체육관 보조농구장내 천막보수 및 물받이 설치공사 등	공사중

□ 주요 추가 공사시행 내용

구분	개략공사비	공사내용	비고
18차	***백만원	********************** ***************** ****************** *************************** ********************** ********************* ********************************* ********************	11월 즉시시행
19차	***백만원	****************************** *************************	추가검토 후 시행

Ⅲ		설계변경 내용

□ 공사비 증감 : **************

구 분	당 초	변 경	증감
총공사비	***********	***********	*************
공급가액	***********	***********
부가세	**********	**********

※ 공종변경 : 210공종 ⇒ 223공종

◯ 예산과목 : 노후체육시설 개보수사업, 잠실종합운동장․구의야구공원 시설개보수, 시설비(경기장 시설물 (건축,토목연간단가) 유지보수공사))

□ 공사기간 변경 : 시설물 유지보수공사의 연속성 및 업무 공백기간 최소

◯ (당초) 2021.04.01. ~ 2021.12.15

◯ (변경) 2021.04.01. ~ 2021.12.31

□ 위와 같이 설계변경을 실시하여 금년 건축분야 시설물유지보수에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 2021년 시설물유지보수공사(연간단가)추가 공사예정 현황 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액조정검증 확인서 1부

4. 설계변경 합의서 1부.

5. 설계변경 사유서 1부.  끝.