문서번호	빅데이터담당관-10279
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		빅데이터인프라팀장	빅데이터담당관
김효태		유혜정	11/08 이수재
협조
	실무사무관		임한숙

마이데이터(본인정보 활용 지원) 실증서비스 지원 사업 10월 월간보고

2021. 11.

빅데이터담당관

- 2021년 마이데이터 실증서비스 지원 사업 -

10월 월간보고

□ 10월 사업추진계획 및 추진실적

수행기관	세부사업명	추진계획	추진내용 및 결과	달성도(%)
서울특별시	사업총괄 및 시스템 구성	주요 회의 개최 협약 변경 일정관리	내부 중간보고회 추진 - 회의 개최 ▪영상회의(홍보영상제작 회의(10.5.), 전자계약서제공 회의(10.25.)) ▪주간회의(10.26) 설계단계 감리 시정조치 및 결과 제출 3차 협약 변경업무 총괄	***
		마이데이터 플랫폼 구성	인프라장비 도입 관련 보안성검토 승인 완료 - 데이터센터와 인프라장비 입주협의 - 입주협의 검토 시간 필요로 장비 납품 기한 연기 요청	***
		마이데이터 서비스 설계	- 테스트 도메인 등록 (test-wallet.seoul.go.kr) - 이사온 내부 베타테스트 진행 및 안내 정부24앱 전입신고 기능 호출 정보 요청 및 전달	***
		‘이사온’ 서비스 활성화	- ‘이사온’ 홍보계획 수립 ▪리플릿 디자인 기획 및 시안 검토 ▪K-data 지원 제작 광고영상 시나리오 검토 홍보물 제작 업체 선정	***
한국부동산원	마이데이터 연계	시스템 연계작업 협의	- 마이데이터 시스템 연계를 위한 인터페이스 레이아웃 조정 중 - 계약서 pdf파일 전송방안 협의	***
신한은행	데이터 이용 (전세자금대출)	API 기반 데이터 수신 개발 착수 (보안성 심의 포함)	- 보안성 심의 승인 완료 - 행안부 공공마이데이터 유통체계 구축 사업단 데이터제공 내용 수정으로 전자계약서 PDF 수신 및 처리방안 조정 App to App 호출테스트 완료	***
	‘이사온’ 서비스 홍보	업체 선정 홍보 시나리오 수립 영상제작 착수	- 업체선정 완료 - 홍보 시나리오 콘티 확정 (컨소시엄 내 협의 완료) - 영상 제작 착수	***
유라클	마이데이터 앱 개발	설계 및 개발	- 서울지갑 앱 內 마이데이터 내려받기 소득구분, 이용 영수증 설계 수정 (영수증 구분 세분화 및 서비스 메뉴 별 내려받기 경로) - APK 개발, 검증, 운영 서버 구성 (개발/운영, 검증/운영, 운영/운영) - 수신 데이터 구분(XML, PDF) 처리	****
		앱 UI/UX 및 서비스	- AOS, iOS 앱 화면 개발 - 마이데이터 꾸러미 목록, 서류별 상세내용 조회, 이용 영수증 페이지 수정 및 보완 - 공통기능 요구사항 화면 수정 - 베타 테스트 및 수정요청사항 처리	****
		마이데이터 플랫폼 및 신한은행 연계	- 암호화 처리 알고리즘 변경 사항 적용(RSA1024 --> 2048) - 신한SOL 앱 연계 (AOS, iOS) : TI 및 Tocken 값 정보 처리 - 정부24 앱 호출 처리 (AOS, iOS)	****
에스앤피랩	마이데이터 플랫폼 개발	행안부와 중계 PDS간 실망 연계	- 실망 환경 서비스 구성 - 실망 연계 테스트	****
		실망 환경에서 ‘이사온’앱과의 서비스 통합	- 연계 데이터 테스트 - 실망 서비스 환경 구축	****
		베타테스트 진행	- 테스트 망 환경 베타 - 실망환경 베타 진행 (진행중)	****
		서포터즈 운영	- 공공 마이데이터 서비스 인식 활동 - ‘이사온’ 앱홍보를 위한 기획안 작성	****
		H/W 입주 진행	- HW입주를 위한 보안 검토	***

□ 11월 사업추진계획

서울특별시	o 사업 총괄 관리 o 마이데이터 인프라장비 입주 협의 진행 o 이사온 홍보물 제작 발주 및 홍보물 등 심의 준비, 보도자료 작성 o 이사온 외부 테스트 진행 o 주요 회의 개최(주간회의 등)
한국부동산원	o 행안부 마이데이터와 전자계약시스템 연계업무 수행 - 계약서 다운로드 서비스 구축 및 테스트 - 마이데이터 연계 송수신 테스트
신한은행	o 이사온서비스 연계 전세자금대출 테스트 / 서비스 제공 - App to App 호출 테스트 완료 이후, API 방식 데이터 호출 및 수신 테스트 o 이사온서비스 마케팅 계약체결 및 영상제작 - 계약 확정 및 홍보영상 제작 완료 - 매체노출
유라클	o 설계/개발 - 마이데이터 및 이사온 서비스 서울지갑 서버 적용 ▪검증/운영 간 네트워크 통신 및 서버 연결 ▪DB 설계 내역 검증/운영 서벗 적용 ▪사용자 단말 저장 마이데이터(XML) 앱 화면 View 방안 o 앱 UI/UX 및 서비스 - 베타테스트 및 오류/보완사항 수정 - 단위/통합 테스트 수행 - 사용자 매뉴얼 작성 및 스토어 업데이트 - 오픈 홍보 및 민원 접수/안내 o 마이데이터 플랫폼 연계 - 통합 테스트 시나리오 절차 수행 ▪마이데이터 내려받은 데이터와 전송데이터 무결성 검증 ▪사용자 인증 정보 및 이력정보 검증
에스앤피랩	o 서울시 마이데이터 실망 환경 베타 테스트 진행 - ‘이사온’ 앱에서 이사행정의 전 서비스를 실 사용자 대상으로 테스트 수행 o 서울시 마이데이터 서비스 홍보를 위한 서포터즈 활동 - ‘이사온’ 서비스 홍보를 위한 기획안 작성 및 홍보 활동 수행

□ 사업추진계획 대비 실적 부진사유

신한은행	o 공공마이데이터 유통체계 표준화팀과의 전자임대차계약서 제공 내용 수정 - 전자임대차계약 관련 XML + PDF 제공 협의 내용을 번복하여 XML 만 제공하되 PDF는 별도 제공 방식으로 변경, 한국부동산원과 협의하여 PDF 제공 관련 대안 협의 - 대법원 제공 가족관계증명서 규격 및 제공방법 11/5 확정으로 인해 데이터 수신 테스트 지연

□ 플랫폼 및 서비스 개발 현황

유라클

o 공통기능 요구사항 및 설계 세분화 화면 적용 내역

에스앤피랩

o 서울시 마이데이터 PDS구축 S/W 구현 (실망환경)

- 이사온 꾸러미 데이터 중계 서비스 실망 환경 테스트

▪네트워크 구성 / 미들웨어 서버 실망 환경 구성 및 테스트

▪행안부 마이데이터 꾸러미 서버 실망 환경 데스트 수행

- 실망 환경 꾸러미 데이터 중계 테스트 및 문제 사항 보완

▪pdf 파일 전달에 대한 문제 사항 해결을 위한 신규 방안 설계(xml에 url 링크 형태로 전달)

▪꾸러미 실 데이터 xml 구조에 따른 앱 데이터 노출 방안 재설계

▪확정일자를 포함한 꾸러미 데이터 파일 업데이트

<부동산원 계약서 샘플 xml – 확정일자, pdf URL 포함>

o 마이데이터 서비스 서포터즈 운영

- ‘이사온’ 앱 서비스 홍보를 위한 기획안 작성을 위한 서비스 설명

- 공공 마이데이터 서비스에 대한 인식을 위한 강의 활동 수행

- ‘이사온’ 앱 서비스 기획안 작성

<영상 기획안 제출 예시3>	<영상 기획안 제출 예시2>

□ 사업비 집행실적

비 목	현금	현물	계(A)	기집행금액 (B)	금월집행액 (C)	잔액 (A-B-C)
1. 인건비	***********	***********	***********	***********	***********	***********
1.1 보수	***********	***********	***********	***********	**********	***********
1.2 상용임금
1.3 일용임금
2. 사업운영비	***********	*	***********	**********	*********	***********
2.1 일반수용비	***********	*	***********	**********	*********	***********
2.2 공공요금 및 제세	**********	*	**********	*	*	**********
2.3 임차료	**********	*	**********	*********	*********	*********
2.4 시설장비유지비
2.5 일반용역비	***********	*	***********	*	*******	***********
2.6 기타운영비	*********	*	*********	*******	*******	*********
2.7 특근매식비	*********	*	*********	*	*	*********
3. 여비
3.1 국내여비
3.2 국외여비
4. 업무추진비	**********	*	**********	*********	*********	**********
5. 연구용역비	***********	*	***********	*	**********	**********
6. 유형자산	***********	*	***********	**********	**********	***********
합 계	*************	*	*************	***********	***********	***********