문서번호	토목부-20510
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	11/08 임춘근
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사-

관계기관 요청사항 설계반영 실정보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(토   목   부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

관계기관 요청사항 설계반영 실정보고

본 공사와 관련하여 관계기관(교량안전과, 서울품질시험소 등)에서 공사에 반영요청 사항이 있어 타당성을 검토하고 설계에 반영코자 실정보고 드림.

1		근 거

◦ 관계기관 요청사항 설계반영실정보고(올림픽대교 교량배수관 개선공사외 3건)[책임감리단]

[올대감21-279호(2021.10.21.)

◦ 공사계약 일반조건(제6절 1항, 설계변경)

- 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

2		사업개요

◦ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

◦ 공사규모

- 램프신설 : L=1,600m(교량2개소, L=446m)

- 램프이설 : L=1,309m(교량1개소, L=139m)

◦ 사업기간 : 2016.04.22 ~ 2022.12.31.(전체), 2021.07.06 ~ 2021.12.31(6차)

◦ 총사업비 : (전체) 56,399백만원(‘21년 : 8,706백만원)

◦ 공 정 율 : 78.0%

3		검토내용

□ 실정보고 요약서

◦ 관계기관 요청사항 설계반영(총4건)

연번	요청 내용	요청기관	설계반영 검토내용	증.감 (천원)	비고
1	올림픽대교 교량배수관개선 등	교량안전과	- 올림픽대로 확장부로 유도되는 낙수처리 배수개선 의견반영 등	156,200
2	안전관리계획서 작성비 반영	서울지방 국토관리청	- ‘21년6월 현장점검시 지적사항 → 안전관리계획서 작성비 설계반영	7,700
3	가드레일 수평지지력 시험 반영	서울시 품질검사소	- ‘21년7월 현장점검시 지적사항 → 가드레일 수평지지력 시험 설계반영	9,300
4	조각공원 보도블럭 협의의견 반영	서울 시설공단	- 조각공원 보도블럭포장 관련 주요의견 설계반영	19,200
합 계				192,400

□ 검토 세부내용

[1] 올림픽대교 교량배수관 개선 반영 등

◦ 개요

- 올림픽대로 확장부로 낙수되는 배수문제 개선을 위한 올림픽대교 배수시설물보완 및 교량점검시설 출입문 보완 설계반영

올림픽대로 확장부 낙수현황 (올림픽대교 배수개선 필요)	교량점검시설 출입시설 현황 (출입차단시설물 보완필요)

◦ 추진경위

- [교량안전과]올림픽대교 배수시설물 협의

⦁ ‘21.09.16 : 올림픽대교 낙수로 인한 유도배수관 설치관련 협의 회신[교량안전과→도기본]

- [서울시설공단]교량점검시설 출입문 협의

⦁ ‘21.09.07 : 교량점검시설 출입문 형식 의견 회신(서울시설공단→도기본)

◦ 반영계획

- [교량안전과]올림픽대교 배수시설물 협의의견 설계반영

관계기관(교량안전과) 요구사항	반영계획	비고
⦁기존배수관 철거 후 신설시 최대한 인접교각을 활용하여 유도배수 바람.	⦁최대한 인접한 교각으로 유도배수 시공계획
⦁배수관이 꺾이는 구간은 30° 이상의 구배를 반영 시공하기 바람	⦁30° 이상의구배 시공반영
⦁배수관은 지면에서 50㎝ 이격거리를 확보하기 바람.	⦁50㎝ 이격하여 시공계획
⦁중앙부 유도배수관 설치시 이격부 발생하지 않도록 밀실 시공 바람.	⦁유도배수관 이격부 밀실시공 후 실리콘 마감 시공계획

- [서울시설공단]교량점검시설 출입문 협의의견 설계반영

관계기관(서울시설공단) 요구사항	반영계획	비고
⦁향후 유지관리의 효율성(점검시설 출입등)을 위해 해당구간 난간은 절단	⦁교량난간 절단 ⦁교량난간 마감판, 난간 지주 추가 설치
⦁난간절단 후, 출입문은 외부인 출입에 대한 완전 폐쇄 형식으로 적용. ex)방호벽 폐쇄덮개 설치+통로 출입문 설치	⦁방호벽 폐쇄 덮개 기반영되어 있음. ⦁통로 출입문 신규 설치
⦁출입문 잠금처리 (경첩+자물쇠) 조치 후 인계	⦁경첩 및 자물쇠 설치 후 인계 예정

◦ 공사비 증.감 현황

- 기존비목 : 당초단가적용

- ******************************

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
o 구조물공
1. Ramp-J1
점검출입문	통로출입문	개소		1	1		393	393
교량난간지주설치		개소		1	1		211	211
2. Ramp-J2
점검출입문	통로출입문	개소		7	7		2,750	2,750
교량난간지주설치		개소		7	7		1,481	1,481
3. 본선
올림픽대교	교량배수관 신설	m		221	221		92,578	92,578
올림픽대교	기존배수관 철거	m		50	50		3,384	3,384
올림픽대교	교통통제비	회		6	6		14,490	14,490
직 접 비							115,287	115,287
간 접 비							40,913	40,913
도 급 비							156,200	156,200

[2] 안전관리계획서 작성비 반영

◦ 개요

- 관련규정에 따라 안전관리계획서의 작성에 필요한 비용을 공사금액에 계상되어야하나, 당현장은 설계에 누락되어 관계기관(서울지방국토관리청)에서 이에 대한 지적이 있어 설계반영 하고자함.

◦ 추진경위

- [한국시설안전공단]안전관리계획서 검토의뢰 및 결과회신

⦁‘16.07.15.      : 안전관리계획서 검토결과 회신 → “조건부적정”

⦁‘16.08.~’20.11 : 안전관리계획서 재검토결과 회신(1차~6차) → “적정”완결

- [서울지방국토관리청]‘21년 우기대비 건설현장 점검

⦁‘21.06.21. : 국토교통부에서 실시한 “21년 우기대비 건설현장 점검”시

“안전관리계획서 작성비”에 대한 구두 지적(발주처 과태료부과대상)

◦ 관련규정

- 건설기술진흥법 63조(안전관리비용)①항

제63조(안전관리비용) ① 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 “안전관리비”라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

- 건설기술진흥법 91조(과태료) ②항4호

제91조(과태료) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

4. 제63조제1항에 따른 안전관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자

◦ 반영계획

- 산출근거 : 엔지니어링사업 대가기준산출 및 견적서를 비교하여 최저가 금액 반영                                                                   [단위: 천원]

구분	단위	대가 산정시	견적서			비고
			㈜한경 에스앤씨	한국건설 안전(주)	㈜건설안전 지원센터
안전관리계획서 작성비용	PS	10,229	7,700	8,040	8,512	협의율적용 (85.98%)
증·감(대가대비)			-2,529	-2,189	-1,717
검토(안)			◎

◦ 공사비 증.감 현황

- ************************************************

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
o 미확정 설계공종
안전관리비	안전관리계획서	PS		1	1		7,000	7,000
직 접 비							7,000	7,000
간 접 비							700	700
도 급 비							7,700	7,700

[3] 가드레일 수평지지력시험 반영

◦ 개요

- 관련규정에 따라 성토부 가드레일 설치시 수평지지력을 측정하도록 되어 있으나 설계 미반영되어 관계기관(서울시 품질시험소)에서 이에 대한 지적이 있어 설계반영 하고자함.

◦ 추진경위

⦁ ‘21.07.12. : 품질시험계획 이행 확인 점검[서울시 품질시험소]

→ 점검결과 : 가드레일(성토부)은 도로안전시설 및 설치관리 지침등에 따른 수평지지력 시험필요

◦ 관련규정

- 도로안전시설 설치 및 관리지침[차량방호안전시설편, 국토교통부]

2. 방호울타리

2.2.5 성토부에 설치하는 경우

성토부 경사 시작점 (B.P: Break Point) 부근에 설치하는 연성 방호울타리는 지주의 수평지지력(현장지지력)을 측정하여야 하며 그 값은 실물충돌시험장에서 측정한 수평지지력의 90%이상이어야 한다.

나. 지주의 수평지지력시험

~중략~ 지주의 수평지지력 시험은 충돌시험장에서 1개소, 설치현장에서 최소 1개소 이상(1km당 2개소) 실시한다.

◦ 반영계획

- 시험위치 : 성토부 경사 상부에 설치하는 가드레일 (SB-4, SB-5)

- 시험횟수 : 1㎞당 2개소 이상 실시

- 산출근거 :  3.451㎞ × 2회 ≒ 7회

구분	전체 설치연장	지지력시험구간	시험횟수	비고
가드레일(성토부)	8,694m	3,451m	7회	2회/㎞

◦ 공사비 증.감 현황

- **************************************

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
o 가드레일
수평지지력시험		개소		7	7		7,222	7,222
직접공사비							7,222	7,222
간 접 비							2,078	2,078
도급공사비							9,300	9,300

[4] 조각공원 보도블럭 협의의견 반영

◦ 개요

- 당 현장의 중앙녹지내 위치한 조각공원의 보도포장과 관련하여 관계기관(서울시설공단)의 협의의견을 설계에 반영하고자함.

◦ 추진경위

⦁ ‘21.09.03 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 지장물 재협의관련 검토의견 회신(서울시설공단→도기본)

⦁ ‘21.09.06 : ’보도설계지도 대상 제외’ 회신(서울시 보도정책과 보도관리팀)

◦ 반영계획

- [서울시설공단]보도블럭 협의의견 설계반영

관계기관[서울시설공단] 요구사항	반영계획	비고
⦁공사 시행 시 존치되는 시설물(상징조형물, 석재계단, 경계석 등)은 훼손에 주의하여 주시고, 훼손될 경우 원상복구를 원칙으로 시행 바람.	∙ 조각공원내 상징조형물, 석재계단은 존치가능 ∙ 경계석은 노후화로 인해 교체
⦁보도블록 구간의 경우 서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼 VER2」의 기준을 적용하여 시공해 주시기 바라며, 장애인 점자블록 포함하여 시공 바람	∙ 보행정책과 보도관리팀 문의 및 회신 - 공원등은 보도설계지도 대상이 아님 (대상 : 보행자의 통행을 위한 도로) ∙ 담당자 재협의 완료 - 보도블럭자재는 녹지가 설치되어 있으므로 불투수성 자재로 노면배수 - 장애인 점자블럭 시공 - 시설안내판은 삭제
⦁보도블록구간 시공시 우천으로 인한 체수 구간 발생이 없도록 시공법 및 자재 선택 바람
⦁기존 설치된 시설물이 아닌 신규 시설물(시설안내판 등)의 경우 유지관리부서와 필요성 여부 및 위치, 문구 등 상세 내용 협의 후 설치 여부 결정바람

◦ 공사비 증.감 현황

- 기존비목 : 당초단가적용

- *******************************

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
1. 토공 및 철거
파쇄물 상차		m3	103	122	19	221	261	40
포장철거외		식	1	1	1	1,550	2,628	1,078
2. 포장공
소형고압블록	TYPE-A,B	m2	1,350	1,196	-154	16,316	14,450	-1,866
경계석	녹지, 보차도	m	70	425	355	1,550	9,502	7,952
장애인점자블록	TYPE-A,B	m2		88	88		7,049	7,049
3. 시설물설치
시설안내판		개소	1		-1	1,139		-1,139
직 접 비						20,776	33,890	13,114
간 접 비						13,324	19,410	6,086
도 급 비						34,100	53,300	19,200
관급자재비						1,130	7,380	6,250
폐기물처리비						5,780	6,890	1,110
총공사비						41,010	67,570	26,560

4		감리단 검토의견

○ 금번 실정보고는 관계기관 협의사항에 대한 설계반영 사항으로서 상기와 같이 설계반영함이 타당할 것으로 사료됨.

5		조치계획

○ 책임건설사업관리기술자의 “관계기관 요청사항 설계반영 실정보고(올림픽대교 교량배수관 개선공사외 3건)”내용이 타당하다 판단되므로 공사의 시급성을 감안하여 상기와 같이 우선 시행을  승인하고, 추후 정산내용으로 설계변경에 반영코자 합니다.

붙  임 : 책임건설사업관리기술자 검토 보고서 1부.  끝.