문서번호	시설개선과-8134
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		代황인정	11/08 김정열
협 조
	운영기획과장			오부태

설계변경 검토 보고

2021년 경기장 시설물 기계설비 유지보수공사 (연간단가)

2021. 11. 8(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2021년 경기장 시설물 기계설비 유지보수공사(연간단가) -

설계변경 검토 보고

『2021년 경기장 시설물 기계설비 유지보수공사(연간단가)』의 계약금액 소진에 따른 집행잔액을 사용하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 경기장 시설물 기계설비 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사내용 : 경기장 시설물 기계설비 유지보수 280개 공종

❍ 도 급 자 : 공항시설관리㈜  대표 임동만

❍ 공사기간 : 2021. 4. 02 ~ 2021. 12. 20

❍ 계약금액 : 금240,568,000원

Ⅱ		보고내용

❍ 2021년 경기장 시설물 기계설비 유지보수공사 작업지시 세부내역 : 공정율 99.2%

순차	작업 지시일	완료 보고일	금액 (천원)		공사지시 내용
1	04.26	05.22	31,269		급수급탕 및 환기설비 보수외 10개소
2	06.02	07.30	79,774		화장실 급수배관 수리외 12개소
3	08.12	08.30	66,504		1층 화장실 오배수 배관 교체공사외 8개소
4	09.16	10.22	58,272		주경기장 정화조 오수배관 교체공사외 1개소
합계			235,819
계약금액				집행금액		남은금액
240,568,000원				235,819,000원		4,749,000원

❍ 추가공사 소요예산 : 24,912천원

- 차후 겨울철 동절기, 월간점검 등 긴급 보수 대비

- 주요 추가 공사 시행 내용

․ 제1수영장 다이빙풀 순환펌프 배관 및 스팀배관 부식으로 보수

․ 주경기장 정수배관 및 오수배관 부식으로 보수

․ 제2수영장 스킨스쿠버 환기설비 배수 등

❍ 예산확보 방안 : 본 공사 집행잔액 사용하여 설계변경 시행

- 예산 현황

구 분	예산	원인행위금액	집행잔액	비고
2021년 경기장 시설물 기계설비 유지보수공사(연간단가)	280,000,000원	240,568,000원	39,432,000원

- 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실종합운동장 시설개․보수, 시설비및부대비, 시설비(경기장시설물 유지보수공사)

Ⅲ		검토내용

❍ 상기 내용과 같이 본 공사 집행잔액을 사용하여 설계변경 시행하여 차후 겨울철 대비         긴급보수 사항에 대비하고자 함

❍ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증감	비고
공사금액	240,568,000원	265,480,000원	증24,912,000원	물량증가

끝.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 설계변경 합의서 1부. 끝.