투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]위례선 차량 재입찰 결과 재유찰인 경우 방안은 무엇인가요?

**** 평소 우리 시정에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

우리 시는“위례선 트램 차량 10편성 구매”건에 대해 조달구매 요청하여 ’21.05월 공고하였으나, ’21.08.19.(1차), ’21.09.01.(2차) 2회 무응찰 유찰 되었습니다. 이후 적정한 사업비 책정을 위해 트램 원가계산 용역 실시 및 제작사 면담 등 내부검토를 거친 후 9편성을 선구매 추진하고 1편성은 추가 사업비가 마련되는 대로 증편 변경계약을 추진하고자 합니다. 단, 또 다시 유찰될 경우 입찰 방법, 규격 등에 대해 재검토 해야할 것으로 사료됩니다.

차량 납품기한의 경우 45개월의 책정은 건설공사 진흥법에 따른 건설기술심의 시 위례선 트램사업의 적정 공사기간을 참고하였으며, 철도안전법에 따른 트램 차량 기술기준(국내 규정) 마련 예정기간 등을 감안하여 책정하였습니다.

기타 더 궁금한 사항이 있으시면 서울시 도시기반시설본부 도시철도설비부 02-772-7289으로 전화주시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							이은석			차량과장					강치석					도시철도설비부장					11/08 김중영
협조자
시행			도시철도설비부-10210									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 8층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		772-7289						/전송			772-7308					/													/	부분공개(6)