문서번호	공원시설과-6616
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		공원시설과장		공원부장
이호연		양돈욱		11/09 김상국
협 조

광나루 한강공원 스케이트보드장 편의시설 확충 계획

2021. 11.

공  원  부

(공 원 시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

광나루 한강공원 스케이트보드장 주변 편의시설 확충 계획

금년 조성된 광나루 한강공원 스케이트보드장 주변 편의시설을 확충하여 시설을 이용하는 시민에게 보다 쾌적한 한강공원 환경을 제공하고자 함

□ 관련근거

○ 시의원 현장 방문 및 시민 건의사항(’21. 8. 25.)

- 스케이트보드장으로 접근할 수 있는 보행로와 앉아서 쉴 수 있는 옥외벤치 설치 및 녹음수 식재 요청(환경수자원위원회 송명화의원)

- 스케이트보드 전용시설 안내판 설치 요청(스케이트보드 협회)

□ 시설현황

○ 시 설 명 : 광나루한강공원 스케이트보드장

○ 위    치 : 송파구 풍납동

○ 규    모 : 스케이트보드장 1면(A=1,500㎡)

○ 조 성 일 : ’21. 8. 20.

□ 추진경위

○ ’21. 1.  7. : 광나루 한강공원 체육시설 확충․정비계획 수립

○ ’21. 4.  2. : 공사 발주(광나루한강공원 스케이트보드장 조성)

○ ’21. 4. 22. : 공사 착공

○ ’21. 8. 20. : 공사 준공

○ ’21. 8. 25. : 시의원 현장 방문

□ 현  황

○ 스케이트보드장을 이용한 접근로가 설치되어 있지 않아 야구장 옆 녹지를 통해 이동하는 불편 발생

○ 여름철 스케이트보드장 이용 시 앉아서 쉴 수 있는 그늘 및 편의시설이 없어 휴게공간 설치 필요

○ 스케이트보드 전용시설에 대한 이해 부족으로 BMX, 인라인스케이트 등 다른 이용자와의 다툼, 분쟁 우려로 시설 안내표지판 필요

□ 추진계획

○ 편의시설 확충(안)

- 접근 보행로 조성 : 보행매트 설치 B=1.5m, L=150m

- 이용시 앉아서 쉴 수 있는 휴게시설 설치 : 옥외용벤치 6개소

- 여름철 더위를 피할 수 있는 녹음수 식재 : 교목(느릅나무) 17주

- 시설 이용 수칙 안내표지판 설치 : 1개소

○ 사업개요

- 공 사 명 : 광나루한강공원 스케이트보드장 편의시설 확충 공사

- 기    간 : ’21. 11. ~ 12.(28일)

- 계약방법 : 수의계약(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호)

※「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업과 수의계약

- 총사업비 : 37,670천원(도급비 26,687천원 / 관급비 10,983천원)

※ 소요예산은 ‘광나루한강공원 스케이트보드장 조성공사’ 집행잔액(37,811천원)을 사용하고자 함

○ 예산과목

- 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 한강공원 직영 체육시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 향후 추진일정

○ ’21. 11. : 공사계약 및 착공

○ ’21. 12. : 공사완료

광나루한강공원 스케이트보드장 편의시설 확충 계획

조성계획도(안)

현 장 사 진