문서번호	시설과-5437
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김현태	김대영	박종수	11/09 박미애
협 조

노후 공원등 시설개선 사업

낙찰차액 사용 및 설계변경 검토 보고

2021.  11.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

노후 공원등 시설개선 사업

낙찰차액 사용 및 설계변경 검토 보고

노후 공원등 시설개선 사업에 사용하고 남은 낙찰차액을 사용하여 보라매공원 축구장에 설치된 노후 투광등을 정비하고자 함.

1		예산 집행 현황

○ 2021. 11. 5. 까지 예산 집행 현황

예산과목	재배정액	기 원인행위액	낙찰차액 및 집행잔액
노후 공원등 시설개선	************	************	***********

○ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 시설비, 노후 공원등 시설개선

○ 예산 집행 세부내역

사용내역	지출품의액	원인행위액	차 액
관급자재 구매 (도로표지병)	************	************	************
관급자재 구매 (LED등기구외 10종)	************	************	************
공사 발주	************	************	************
합 계	************	************	************

2		예산 집행 계획

○ 예산 집행 방향

- 예산 범위내에서 보라매공원 축구장에 설치된 노후 투광등 교체

○ 보라매공원 축구장 투광등 조명 현황

구 분	전체 등수	메탈헬라이드 램프(1kW)	LED 램프(600W)
투광등	48등	36등	12등

- 투광등주: 4본(1본당 투광등 12등 설치)

- 투광등주 3본 메탈헬라이드 램프 36등, 1본 LED 램프 12등

○ 사업대상

- 사 업 명: 율현공원외 2개소 노후 공원등 개선 공사

- 사업내용: 보라매공원 축구장 노후 투광등 24등을 교체, 설계변경 하고자 함

공 종	당 초	변 경	비 고
투광등 교체	-	24등	신규 일위대가

- 설계 변경 소요예산

***************************************************

- 낙찰차액 사용

***********************************************************************************

- ***********************************

3		설계변경 추진 계획

□ 관급자재 발주

○ 구매자재: LED 투광등

○ 구매방법: 조달 구매

○ 제작기간: 계약일로부터 20일

□ 공사 발주

○ 설계변경 계약 발주

구 분	당 초	변 경	비 고
도급 공사비	************	************	************
관급 자재비	*************	*************	*************
합 계	*************	*************	*************

4		추진 일정

○ 2021. 11. : 공사 변경 계약 의뢰 및 관급자재 발주

○ 2021. 11.	: 관급자재 검수

○ 2021. 12.	: 공사 준공

붙임: 1. 설계변경내역서 1부.

2. 보라매공원 축구장 조명 사진 1부.  끝.