문서번호	녹지관리과-8226
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
김재희		곽영만	11/09 김상국
협조

「2021년 한강 고수호안 녹화지 유지관리 공사(강서지구 3개소)」

실정사항에 따른 설계변경 보고

공  원  부

(녹지관리과)

「2021년 한강 고수호안 녹화지 유지관리 공사(강서지구 3개소)」

실정사항에 따른 설계변경 보고

본 공사와 관련하여 다음과 같이 실정사항을 검토하고 설계변경하여 사업시행하고자 함.

1		공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2021년 한강 고수호안 녹화지 유지관리 공사(강서지구 3개소)

나. 총공사비 : 123,839천원

(도급비 123,635천원, 관급자재 204천원)

다. 공사기간 : 2021.6.1.~11.17.

라. 도 급 자 : ㈜보성조경 대표 유연송

2		검 토 내 용

가. 현장 실정사항

구분	현황 및 문제점	검토 결과	비 고
식재 공사	고수호안 보식 대상지는 기존에 수크령 식재지로 호안생육에 적합한 수크령으로 변경 필요	- 기존 가양2지구 좀작살나무 보식(H1.2xW0.4), 맥문동 보식(8cm) 삭제 가양1지구 85㎡ 수크령 보식(8cm) 추가
		증 : 1,393,905원
조경 유지 관리 공사	잦은 우천으로 인한 관수유지관리 횟수 감소 필요	- 관수 유지관리 5회 → 1회
		감 : 1,117,200원
	민원사항(뚝섬안내센터-5853.2021.10.15.)관련 청담대교-잠실대교 구간 제초 작업 필요	- 청담대교-잠실대교 사이 사면 3,000㎡ 제초 작업 추가 사면 수목 10주 가지치기 작업 추가
		증 : 3,049,727원
	폐기물 처리량 감소	- 폐기물처리비 7.167ton → 4.5ton
		감 : 232,562원
제경비	미사용 환경보전비 감액 및 순공사비 증액으로 인한 제경비 변경	- 환경보전비 감액 및 경비, 일반관리비, 이윤 금액 변경
		증 : 318,130원

3		개략공사비

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	112,395,455	115,497,273	3,101,818
	부가세	11,239,545	11,549,727	310,182
	도급비계	123,635,000	127,047,000	3,412,000
관 급 액		204,000	204,000	-
총 공 사 비		123,839,000	127,251,000	3,412,000

4		조 치 계 획

상기 검토 내용에 대하여 승인하고 설계 변경하여 사업 시행.

붙 임 : 1. 변경 내역서 1부.

2. 민원 관련 공문 1부.  끝.