문서번호	공원운영과-14131
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
총무팀장	공원운영과장	동부공원녹지사업소장
곽선아	유병오	11/09 박미애
협 조
	공원여가과장		윤세형
	시설과장		代하종식
	조경지원과장		김달용
	서울숲공원지원과장		송복식
	공원운영팀장		이재이
	재무팀장		장호정
	공원조성팀장		하종식
	서울숲관리팀장		양혜정

『산하공원의 효율적 관리를 위한』

동부공원녹지사업소 청사 이전 계획

2021. 11

동부공원녹지사업소

(공 원 운 영 과)

『산하공원의 효율적 관리를 위한』

동부공원녹지사업소 청사 이전 계획

산하공원의 효율적 관리를 위해 사업소 청사를 이전하여 시민들의 공원이용 만족도를 높이고 효율적으로 공원을 운영하고자 함

□ 추진근거

❍ ‘뚝섬 승마훈련원 리모델링 및 동부공원녹지사업소 사무동 이전 계획’ 수립(’21.8.3.)

************************************************************

************************************************************

□ 추진배경

❍ ’22년 인수예정인 위례공원 및 사업소 산하 관리공원이 대부분 동부권에 위치해 있어 효율적인 공원관리 및 신속한 시민 응대를 위해 이전 필요

*************************************************************************

□ 추진방향

❍ 동부공원녹지사업소 청사 이전 → 서울숲 방문자센터(1,2층)

- (1층)방송실, 중앙통제실 재배치 : 당직실(CCTV모니터링, 방송통제 등)

- (2층)기존 민간위탁 사무공간 재배치 : 공원운영과, 여가과, 시설과

❍ 서울숲관리사무소 임시 이전 → 서울숲 수변휴게실(2층)

- (2층)수변휴게실 공간 : 서울숲관리사무소 사무공간, 프로그램 지원실 등

※ 뚝섬 승마훈련원 건물 리모델링 완료(’22. 12월)후 서울숲관리사무소 이전

❍ 예산·일정을 고려하여 부서별 신속하고 순차적인 재배치 추진

※ 보라매공원 관리를 위해 기존 청사에 조경지원과(보라매관리팀) 잔류

□ 부서 재배치 및 공간조성 계획(안)

동부공원녹지사업소 청사 이전 → 서울숲 방문자센터(1,2층)

❍ (1층) 민원응대 및 보안근무(CCTV모니터링)를 위한 공간 조성

․ 방송실과 중앙통제실 공간을 통합 → 민원응대 및 보안근무 기능으로 활용

※ 공간 통합을 위해 옹벽 철거시 먼지로 인해 통신장비 피해 등 검토 후 진행

․ 기존 방송장비 및 신규 구매 통신장비 →  중앙통제실로 일괄 배치

․ 공익근무, 청원경찰실 → 프로그램 지원을 위한 기간제 근무장소로 활용

❍ (2층) 효율적인 사무공간 활용을 위한 재배치

․ 민간위탁 사무공간 → 소장실(비서실), 공원운영과(3개팀), 회의공간 배치

※ 기존 모니터링 TV, 통신장비(무전기) 등 서울숲관리사무소로 이전 검토

․ 대표실, 세미나실(회의실) → 공원여가과(1개팀), 회의공간 배치

․ 직원용 식당, 주방 → 시설과(2개팀), 회의공간 배치

․ 기존 서울숲지원과 사무공간 → 공용 회의실

․ 부족한 사무공간 확보를 위해 탕비실 공용 운영, 여직원 휴게실 개선 등

◆  층별 부서배치(안)

층수	면적	공간명(부서명)
		변 경 전	변 경 후
2층	324㎡	민간위탁 사무공간, 대표실, 세미나실(회의실)	공원운영과, 공원여가과
	108㎡	직원용 식당, 주방	시설과
	72㎡	서울숲관리사무소 사무공간	공용 회의실
	18㎡	탕비실, 여직원 휴게실	탕비실·여직원 휴게실 기능유지(공용공간)
1층	38㎡	방송실, 중앙통제실(분리)	당직실 기능(방송실·중앙통제실 통합)

서울숲관리사무소 임시 이전 → 서울숲 수변휴게실(2층)

❍ (2층) 신속한 현장관리를 위한 관리사무소 공간 조성

․ 수변휴게실 가벽 철거 →  관리사무소 사무공간(2개팀), 프로그램 지원실 등 배치

□ 추진방법

❍ 서울숲 수변휴게실(2층) 선 시공으로 관리사무소 이전 추진

- 수변휴게실 노후 냉․난방기 교체 및 전기, 통신 작업 시행

- 사무공간 조성을 위한 일부 실내 인테리어 시행

- 기존 사무집기(책상․의자․캐비넷 등) 활용

❍ 효율적인 사업소 청사이전을 위해 사전 작업 추진

- 방문자센터(2층) 식당․주방시설 철거 후 사무공간으로 개선

- 사무공간 사용을 위한 기반 시설작업 시행(전기․통신 등)

- 사무환경 개선을 위해 실내 및 바닥(타일) 교체 등 인테리어 공사

※ 서울숲 ‘행정 네트워크 통신망 구축’을 위한 장비 구매

❍ 기존 사무집기를 최대한 활용하고 필요시 내구연한 경과 물품 교체

- 부서별 공간면적을 고려하여 이전 가능한 사무집기 조사 및 선정

- 내구연한을 경과한 노후 집기 및 장비 등 청사 이전 전에 불용처리

◆  부서별 추진업무 현황

추 진 업 무	추진부서	지원부서	비고
․ 전기 시설 및 통신 시설 시공 ․ 기계(설비) 및 건축(인테리어) 시공 ․ 행정 네트워크 통신 장비 구매 등	시설과 (총괄)	총무팀 서울숲지원팀
․ 사업소 청사 이전 용역 시행 ․ 서울숲관리사무소 이전 용역 시행	총무팀	각부서 (서무주임)
․ 청사이전관련 행정사항 추진 - 행정기구 설치조례 개정 등(사업소 위치 변경) - 직원 배치관련 PC확보, 행정전화 이전 설치	총무팀	-	조직담당관 정보통신담당관
․ 부서별 사무집기 및 물품 조사	각 부서 (서무주임)	재무팀
․ 불용대상 집기, 물품 등 처분	재무팀	-

□ 소요예산

****************************************

*********************************************

*************************************

**************************************

****************************************

**********************************

***************************

************************************

❍ 예산과목

- 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 응봉공원 시설물 정비, 시설비(401-01)

- 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원,

동부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 공공운영비(201-02)

※ 2차 사업소 청사 이전 및 재배치 예산은 향후 세부 산출

□ 추진일정

❍ 동부공원녹지사업소 청사 이전 → 서울숲 방문자센터(1,2층)

- ’21. 10~12 : 공간 재배치 도면 작성 및 전기·통신 등 시설 공사

- ’22.  1~ 2 : 서울숲 방문자센터(2층) 인테리어 공사

- ’22.  3 ~   : 서울숲 방문자센터로 사업소 청사 이전

❍ 서울숲관리사무소 임시 이전 → 서울숲 수변휴게실(2층)

- ’21. 10~11 : 공간 재배치 도면 작성 및 전기·통신 등 시설 공사

- ’21. 12      : 수변휴게실(2층)으로 서울숲관리사무소 임시 이전

※ 예정 일정은 현장 여건에 따라 변경될 수 있음

붙 임 : 1. 동부공원녹지사업소 청사 이전 재배치(안) 도면 1부

2. 서울숲관리사무소 사무공간 이전 재배치(안) 도면 1부.  끝.