문서번호	박물관과-11998
결재일자	2021. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	11/10 이성은
협조

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』

건축공사 실정보고(5차) 검토보고

2021. 11.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』

건축공사 실정보고(5차) 검토보고

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』추진 중 시공자와 감리자로부터 건축 및 지붕, 조경공사 실정보고가 접수되어 이에 대하여 검토하여 보고함.

□ 공사개요

○ 위    치 : 서울특별시 성북구 대사관로 3외 3필지

○ 규    모 : 지하2층/지상2층, 7개동, 총연면적 4,339㎡

○ 공 사 명 : 삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사

○ 시 공 사 : ㈜마노종합건설, ㈜한울조경산업, ㈜한미외장

○ 공사기간 : ’21. 3. 30. ~ 11. 30.

○ 계약금액 : ***********

□ 추진 경위 및 근거

○ 추진 경위

- ’21. 3. 30  : 공사 착공

- ’21. 9. 30  : 예비준공검사

- ’21. 11.(현재): 공연장 마감 공사 진행중

○ 추진 근거

- 지방계약법 예규(행안부 제114호, 2020. 6.10.) 제13장 제6절

- 공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 박물관과-10692(2021. 10. 7.) 예비준공검사 결과보고

- MANO건-*******06호(2021.11.9.) 실정보고 및 정산내역 검토 건

- 에이아이앤건축사사무소 제2021-85(2021.11.9.) 실정보고서 제출

□ 실정보고 검토 내용

○ 실정보고 사유 및 내용

① 유지관리기관 요청 사항 반영에 따른 보수공사 수량 변경

*****************************************************

******************************************

② 유지관리기관 요청 사항 반영에 따른 추가공사 반영

*************************************************

***************************

******************************************

************************************************

③ 기와공사 완료에 따른 제경비 정산

************************************************

④ 조경공사 완료에 따른 직접공사비 및 제경비 정산

********************************************

****************************************

************************************************

○ 실정보고 금액

****		**********	*********
*	******************************	****************	******* ***********
*	*********************	****************
*	******************	****************	*****
*	**************************	****************
	*******	****************

① 유지관리기관 요청 사항 반영에 따른 보수공사 계약 수량 변경

○ 실정보고 내용

***************************************************

*****************************************

****************************************

*********************************************

○ 직접공사비 검토                                                   (단위: 원)

****	**	**	**	***			************
				**	**	*********
*****	**********	**	*****	*	****	****	********
*********	********	**	******	*	*****	*****	*********
*****	***********	**	******	*	****	****	*********
*********	*********	**	******	*	*****	*****	********
*****	***********	**	********	*	*****	*****	**********
*********	*****	**	******	*	*****	*****	********
******	**********	**	******	*	****	****	********
************	***	**	********	*	*	*	********
************	**	*	********	*	***	***	********
****	*	**	*******	*	*****	*****	**********
*****	*	**	*******	*	****	****	********
******	***********	**	*******	*	****	****	********
**********	*************	**	******	**	****	******	********
********	***************	**	*******	***	****	****	*******
***	*******	*	*******	*	**	**	**********
******	**********	**	*******	**	*****	****	*******
*******							*********
********							*********
***							*********
***********		**********

****************

② 유지관리기관 요청에 따른 추가공사 반영

○ 실정보고 내용

**********************************************

*********************************

*********************************************

***********************************************

※ 현황 사진

노후 담장	창문 하드웨어	노후 배관	공연장 내부 가구

○ 직접공사비 검토                                                   (단위: 원)

****	*****	*******
		***	***	**** ********
****************	******************************	*********	*********	*********
************	******************** ********************* **********	*********	*********	*********
*************	******************** ************* *************	*********	*********	*********
***************	******************	*********	*********	*********
*******				**********
********				*********
***				*********
***********		**********

******************************************

③ 기와공사 완료에 따른 제경비 정산

○ 실정보고 내용

*********************************************

○ 공사비 검토                                                       (단위: 원)

****	***	***	***	**
*****	*********	*******	***************	****
*****	*********	*******	***************
*********	*******	******	***************
*******	*********	*******	***************
*********	*********	*********	***************
*****	*******	*	***************
*******	*******	*	***************
*****	**********	**********	***************	****
**	**********	**********	***************
*******	*********	*	***************	****
***	**********	**********	***************	***
*******	**********	**********	*************

④ 조경공사 완료에 따른 직접공사비 및 제경비 정산

○ 실정보고 내용

************************************************

*********************************************

******************************************

항 목	당 초	변 경	금 액	비고
*****	***************	************	****************	****
****	*	*********	****************	****
*****	*********	*********	****************	****
*****	*********	*********	****************
*****	*********	*********	*****************
*****	*********	*******	****************	****
*****	*********	*******	****************
*********	*******	******	****************
*******	*********	*********	****************
*********	*********	*********	****************
*******	*******	*	****************
*****	*******	*******	****************
****	**********	**********	****************	****
*****	**********	**********	****************
**	**********	**********	****************
********	*	*********	****************	****
*******	*********	*	****************	**
***	**********	**********	****************	***
*******	***********	***********	**************

○ 직접공사비 검토                                                   (단위: 원)

□ 총 공사비 변경 검토                                     (단위: 원)

공 종	당초금액	변경금액	증 / 감
****	*************	*************	******************
****	***********	***********	******************
****	***********	***********	******************
*******	*************	*************	******************

□ 감리자 검토의견

○ 시공자가 제출한 추가공사 및 변경사항의 실정보고를 검토한 결과, 추가공사 및 변경 부분에 대하여 산출된 공사 수량과 단가가 적정하게 산출된 것으로 판단됨

□ 처리의견

○ 감리자의 검토의견에 따라 실정보고에 대하여 승인하여 조치하고, 추후 설계 변경 절차에 따라 계약변경을 추진하고자 함

붙 임  1. 감리 검토의견서 1부.

2. 삼청각 일화당 등 시설 개보수공사 실정보고서 1부.  끝.