문서번호	한양도성도감-9951
결재일자	2021. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
이성산	이원재	11/10 백운석
협 조

백악구간 CCTV공사 설계변경 계획(안)

2021. 11.

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

백악구간 CCTV공사 설계변경 계획(안)

백악구간 한양도성 외측 CCTV 보강공사를 추진하는중 경비단으로부터 공사내용을 변경해달라는 요구가 있어 예산 및 일정 등을 검토하고 아래와 같이 설계 변경하고자 함.

□ 추진근거

○ 한양도성도감-9930('21.11.09)호「백악구간 CCTV 카메라 구매설치관련 중간보고」

○ 한양도성도감-8952('21.10.08.)「백악구간 CCTV망 보강 및 정비계획」

□ 추진경위

○ '20.11. : 백악산 신규 순성길(탐방로) 시민 개방

○ '19.12. : 백악산 군 통제 구역 전면 개방 언론 발표

○ '19.08. : ************************

○ '14.12. : 서울 한양도성 재난방지 시스템 구축계획

○ '13.10. : 서울 한양도성 보존·관리 및 활용 종합계획

□ 공사현황

○ 계약현황

*************************************************

************************************************

○ 공사내용

- 재난방지 미흡구간 CCTV 카메라 구매․설치

․ CCTV 카메라, 네트워크 스위치, 광 송수신 모듈 등

- CCTV 카메라 설치에 따른 전력 및 통신케이블 설치공사

․ 케이블 및 배관 등 자재비

․ 케이블 공사 및 토공사 등 인건비

○ 공사기간: 2021.10.18.~12.17

○ 계약업체: *****************

*************************

**************************************************************

************************

********************************

□ 설계변경(안)

○ 요구사항

- *****************************

- 한양도성 외측 철책 철거후 노출된 케이블 배관(전기, 통신) 정비 계획 수립 요청

⇒ 2021년에는 노후카메라를 일괄 교체후 케이블 매립은 추후 검토

○ 변경사유: ************ 요구사항을 반영하여 낭비적 요소가 발생하지 않도록 함.

⇒ ********************************************

○ 변경계획

- 기본방향: 기존 계약상대자의 물품 선정

- 카메라 구매․설치 구매 변경(조달우수제품 유지)

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 통신공사 변경: 전액 물량 삭제(49,121,230원 감액)

○ 예산 및 일정검토

- 상기와 같이 변경시행할 경우 1,905,839원이 증액되어 예산 범위내 집행 가능

- 기존 공사기간은 60일정도 소요되나 케이블 매립공사를 삭제하고 카메라 구매설치할 경우 공사기간이 20일정도 단축 예상

□ 추진일정

○ 2021.11.10.: 변경방침 수립

○ 2021.11.10.~11.12: 변경계약(조달 품목 및 수량변경) 의뢰

○ 2021.11.15.~12.17: 공사시행 및 준공

붙임 1. 실무자 회의록 사본 1부.

2. 경비단 공문 사본 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.