문서번호	설비부-15887
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	녹색성장과장	설비부장
유영선	문학준	11/09 김호성

『신림공영차고지(저류조포함) 건설 전기공사』

계약금액 변경 및 공사기간 연장 검토 보고

2021. 11.

도시기반시설본부

『신림공영차고지(저류조포함) 건설 전기공사』

계약금액 변경 및 공사기간 연장 검토 보고

「신림공영차고지(저류조포함) 건설 전기공사」계약금액 변경(ESC) 및 공사기간 연장에 대한 검토 결과 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

****************************************

*************************************

***************************************

******************************

Ⅱ		공사개요

**************************************

*********************************************************************

**************************************************

****************************

*********************************

Ⅲ		검토내용

□ 물가변동으로 인한 계약금액 변경

구 분	계 약 금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 차	1,699,033,910	1,745,246,910	************	물가변동에 의한 금액 조정 승인(설비부-13638호)
2 차분	50,000,000	51,395,000	***********

○ 공사기간 변경

구 분	공사기한 변경		비 고
	당 초	변 경
총 차	2020.10.29. ~2023.12.20.	2020.10.29. ~2023.12.20.	변경없음
2 차분	2021.02.26. ~2021.12.31.	2021.02.26. ~2022.12.30.	증 364일

******

***********************************

**************************

***********************************

******************************

Ⅳ		건설사업관리자 의견

□ 물가변동으로 인한 계약 금액조정(제1회) 승인사항에 대한 변경계약으로 적정하계 반영되었으며,

□ 현장 민원(화원 미이전) 발생으로 주공정(토목) 공사추진이 불가하여 전기공사의 공사기간을 변경함이 타당함.

Ⅴ		조치의견

□ 감리단 의견과 같이 물가변동으로 인한 계약금액과 공사기간을 변경함이 타당하다고 사료되어 총무부에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임 : 변경계약 요청 공문 1부.  끝.